문서번호	도시철도토목부-14903
결재일자	2018.12.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		토목1과장		도시철도토목부장
엄상민		윤방식		12/21 정대현
협 조
	주무관				김용선
	주무관				노권호

『서울지하철 9호선3단계 920공구 건설공사』

예비준공검사 결과보고(10차)

2018. 12

도시기반시설본부

[도시철도토목부]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

『서울지하철 9호선3단계 920공구 건설공사』

예비 준공검사 결과 보고(10차)

지하철9호선 3단계 920공구 10차공사에 대한 준공 기한내 공사 완공 가능여부 및 미진사항의 사전 보완을 위하여 예비 준공검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

1		공사 개요

○ 사 업 명 : 서울지하철9호선 3단계 920공구 건설공사

○ 사업규모 : 총연장 1,390.5m(정거장1개소, 환기구4개소)

○ 사업기간 : ‘09.12.31 ~ ‘18.12.31

○ 사 업 비 : 161,247백만원

○ 계 약 자 : 롯데건설(주) 외 1개사

○ 감 리 사 : 벽산엔지니어링(주)

2		예비준공 검사 현황

○ 일    시 : ‘18.11.13(화)

○ 장    소 : 920공구 회의실 및 현장

○ 예비준공검사자 : 도철토목부 정삼기, 장대성

○ 예비준공검사 입회자

- 본  부

· 도철토목부(노권호, 엄상민), 도철건축부(이재익), 도철설비부(박명기, 김덕진)

- 감리단

· 기술지원건설사업기술자(지석준, 이광한, 김종환, 정차수, 이춘배)

· 책임감리원(이상희)

- 시공사 : 현장대리인(김경용)

3		10차공사 추진현황

○ 공사기간 : ‘18. 2. 9 ~ ‘18.12.31

○ 계약금액 : 금15,410백만원

○ 공 정 률 : 61.90%

○ 10차공사 추진현황

(단위 : 백만원)

구 분	계 약	실 적	잔 량	비 고
금 액	15,410	9,540	5,870

○ 10차공사 시공 현황

구간 및 공종			단 위	계약수량	시공량	잔량	비 고
토목공사	본선 개착	되메우기	m3	15,252	15,252		완 료
		표층포장	a	30.00	6.98	23.02
		보도블록설치	a	7.00	6.15	0.85
	934 정거장	되메우기	m3	20,011	20,011		완 료
		구 조 물	m3	1,740	1,110	630	자전거주차장
		차수그라우팅	m	4,027		4,027	2차 가시설
		표층포장	a	65.00	42.56	22.44
		보도블록설치	a	16.00	15.60	0.40
	본선 환기구	되메우기	m3	9,562	9,562		완 료
		구 조 물	m3	944	944		완 료
		표층포장	a	44.28	3.24	41.04
		보도블록설치	a	4.73	4.38	0.35
	광역상수관 이설 공사		식	1	1	1	정산예정
기타공사	건 축	안내 SIGN	식	1	0.8	0.2
	기 계	장비설치공사	식	1	0.9	0.1	유보금
		E/S공사	대	2.8	2.2	0.6	유보금
		E/V공사	대	4.5	4.0	0.5	유보금
		소화장비 설치공사	대	0.4		0.4
	전 기	전기실장비 설치공사	식	1	0.9	0.1	유보금
		전등설비공사	EA	639	475	164

4		예비준공 검사자 의견

○ 공사완료에 따른 차선도색 및 잔손보기 공정시행 중이나 공정률이 계획대비 실적이 적으므로 최종 준공 전 설계변경 완료 할 것

○ 관계기관의 시설물 인수 인계에 문제점이 없도록 준공청소를 철저히 시행 할 것

○ 준공도서 작성 및 제출에 준비를 철저히 할 것

5		조치계획

○ 10차공사 준공에 차질없이 공정 및 품질 관리에 대하여 철저를 기하도록 책임감리사인 벽산엔지니어링(주)으로 하여금 조치코자함.

붙 임 : 예비준공검사 서류 1부.  끝.