문서번호	도시철도토목부-14920
결재일자	2018.12.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목2과장	도시철도토목부장
임경태		방영복	12/21 정대현
협 조
	주무관			안태현

『지하철9호선 3단계 922공구 건설공사 전면책임감리용역』

설계변경 및 계약금액 조정 검토 보고(총괄9회, 8차1회 및 9차1회)

2018. 12.

도시기반시설본부

도시철도 토목부

『지하철9호선 3단계 922공구 건설공사 전면책임감리용역』

설계변경 및 계약금액 조정 검토 보고(총괄9회, 8차1회 및 9차1회)

『지하철9호선 3단계 920공구 건설공사 전면책임감리용역』과 관련 감리투입 기간 변경에 따른 총괄9회, 8차1회 및 9차1회에 대한 계약금액 조정 검토 보고임. ※ 선진(발)-2018-2643(2018.12.21.)

1		책임감리 용역 현황

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사 전면책임감리용역

○ 계약금액 : 금5,188,762천원(8차:금788,000천원, 9차:501,389천원)

○ 용역기간 : ‘09.11.18 ~ ‘18.12.31

- 8차 : ‘17.08.01 ~ ‘18.12.31

- 9차 : ‘18.08.01 ~ ‘18.12.31

○ 감 리 사 : ㈜선진엔지니어링 외 2개사

□ 발주 현황                                         (단위 : 천원)

구분	총괄	1~7차(준공)	8차(진행중)	9차(진행중)	장 래	비고
용역기간	‘10.08.06 ~’18.12.31	‘10.08.06 ~17.12.31	‘17.08.01 ~18.12.31	‘18.01.01 ~18.12.31	-
용역비	5,188,762	3,899,373	788,000	501,389	-

※ 8차분 : 세입세출외 현금(둔촌주공아파트 재건축조합 수탁공사)

□ 추진 현황

○ ‘17.08.01 : 8차 용역 착수

○ ‘18.01.01 : 9차 용역 착수

○ ‘18.12.21 : 총괄9회, 8차1회 및 9차1회 계약금액 변경 요청(감리단→본부)

2		보고 내용

□ 계약금액 조정 검토 내용

○ 설계변경 현황(총괄9회, 8차1회,9차1회)            (단위:천원)

구 분	용역비			계약기간			비고
	당 초	변 경	증감	당 초	변 경	증감
총괄 9회	5,188,762	4,939,762	(감)249,000	‘10.08.05. ～’18.12.31	‘10.08.05. ～’18.12.31	변경없음
8차 1회	788,000	539,000	(감)249,000	‘17.08.01 ~’18.12.31	‘17.08.01 ~’18.12.31	“
9차 1회	501,389	501,389	변경없음	‘18.01.01 ~’18.12.31	‘18.01.01 ~’18.12.31	“

○ 8차분 감리원 투입계획 및 계약금 조정 현황

- 계약금액 조정 변경내용                                          (단위 : 원)

구 분	변경현황		증 감	비 고
	당 초	변 경
계약금액(원)	788,000,000	539,000,000	감 249,000,000
감리 인ㆍ월	50.000	33.727	감 16.273
과업기간	‘17.08.01 ～ ’18.12.31	‘17.08.01 ～ ’18.12.31	변경없음

- 계약기간 및 감리투입계획 변경 변경내용

구 분 (8차분)		감리투입계획 변경		비고
		당 초	변 경
토 목	고 급	‘17.08.01. ～ ’18.12.31	‘18.01.01. ～ ’18.12.31
	중 급	‘17.08.01. ～ ’18.11.30	‘18.01.01. ～ ’18.12.31
건 축	고 급	‘18.09.01 ～ ’18.11.21	‘18.12.26 ～ ’18.12.31
기 계	고 급	‘18.03.28 ～ ’18.12.31	-
전 기	고 급	‘18.09.01 ～ ’18.09.24	‘18.06.10 ～ ’18.12.31

- 조정사유

․ 둔촌주공 주택재건축조합과 협약 체결한 원인자 부담금공사 추진계획에 따라 협약서   제3조 ⑨항에 의거 정산을 위한 실제 투입시기 조정

․ 상주감리원 투입계획(토목 : 2명, 건축 : 1명, 전기 : 1명)조정 및 실제 투입시기 반영

○ 9차분 감리원 투입계획 및 계약금 조정 현황

- 계약금액 조정 변경내용

구 분	변경현황		증⋅감	비 고
	당 초	변 경
계약금액	501,389,000	501,389,000	-	변경없음
감리 인ㆍ월	42.479	42.479	-	“
과업기간	‘18.01.01 ～ ’18.12.31	‘18.01.01 ～ ’18.12.31	-	“

- 계약기간 및 투입계획 조정 변경내용

구 분 (9차분)		계약기간 및 감리투입계획 변경		비 고
		당 초	변 경
토 목	감리사보	‘18.01.01. ～ ’18.12.31	‘18.01.01. ～ ’18.12.31	변경없음
건 축	감리사	‘18.01.01 ～ ’18.05.15	‘18.01.01. ～ ’18.05.15	“
	감리사보	‘18.05.16 ～ ’18.12.25	‘18.05.16, ～ ’18.12.25	“
기 계	감리사	‘18.01.01. ～ ’18.12.31	‘18.01.01. ～ ’18.12.31	“
	감리사보	‘18.01.01. ～ ’18.03.25	‘18.01.01. ～ ’18.03.25	종료
전 기	고 급	‘18.01.01 ～ ’18.06.09	‘18.01.01 ～ ’18.06.09	종료

- 조정사유 : 도시철도설비부-4544호(2017.04.11)『922공구 기계분야 감리원 투입계획 변경승인』에 의거 감리사 투입시기를 조정하여 9차용역 발주시 기반영 조치됨

3		조치 계획

○ 922공구 전면책임감리용역(총괄9회, 8차1회 및 9차1회)중 8차1회의실제 계약기간 및 투입계획 조정으로 인하여 설계변경 및 계약금액을 정산  처리함이 타당하다고 판단됨.

- 설계변경 현황(총괄9회, 8차1회 및 9차1회)              (단위:천원)

구 분	용역비			계약기간			비고
	당 초	변 경	증감	당 초	변 경	증감
총괄 9회	5,188,762	4,939,762	(감)249,000	‘10.08.05. ～’18.12.31	‘10.08.05. ～’18.12.31	변경없음
8차 1회	788,000	539,000	(감)249,000	‘17.08.01 ~’18.12.31	‘17.08.01 ~’18.12.31	“
9차 1회	501,389	501,389	변경없음	‘18.01.01 ~’18.12.31	‘18.01.01 ~’18.12.31	“

붙 임 : 1. 책임감리원 검토의견 1부

2. 설계변경 내역서 등 관련서류 각1부.  끝.