자연의 맛 미네랄 아리수, 시민과 함께하는 북부수도!
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 심의위원회 개최[2018년 노원구관내 급수공사(장기계속단가계약)]

우리 사업소에서 시행 중인“2018년 노원구관내 급수공사(장기계속단가계약)”에 대해

신규 공종 및 물량 증·감에 따른 설계변경 사유가 발생하여 아래와 같이 설계변경 심의위원회를 개최코자 합니다.

1. 공사 현황

가. 공 사 명 : 2018년 노원구관내 급수공사(장기계속단가계약)

나. 공사개요  - 당초(변경) : D = 13~300mm, L = 1,397m(1,142m)

다. 공사기간 : 2018. 6. 27. ~ 2019. 6. 30.(총부기 기한)

라. 도 급 비

구 분	당 초(원)	변 경(원)	증, 감	공 사 기 간
총부기금액	***********	660,966,700	****	**********************. (총부기 기한)
1차수 금액	***********	204,060,000	감*************
2차수 금액	***********	456,906,700	**************

마. 시 공 사 : ****************

2. 심의회 개최 현황

가. 심의 일정(심의장소)  : 2018. 12. 24(월) 10 : 00(급수운영과)

나. 심의위원장 : 급수운영과장

다. 심의   위원  : 시설7급 윤승구, 시설7급 진하영, 시설7급 박상권, 시설7급 이한수

3. 심의내용

가. 설계변경의 타당성

나. 제경비 적정산정 및 적정적용

다. 부대공 및 신규공종 적정산정

라. 기타 제반규정 적정 준수여부 등.

첨 부 : 설계변경 심의 요청 및 사유서 등 각 1부.  끝.

주무관	김재영		주무관	이문성		급수운영과장	12/24 代이문성
협조자
시행	급수운영과-23229	(		)	접수		(		)
우	01137	북부수도사업소[강북구 한천로 935(번동)]	/
전화	02-3146-3343	/전송	02-3146-3389	/	sdc5000@seoul.go.kr	/	부분공개(5)