투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재(경관조명기구) 납품기한 연기 및 변경 구매의뢰(세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성 전기공사)

1. 우리 본부에서 시행중인 『세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성 전기공사』에 소요되는 관급자재(경관조명기구)에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기 및 변경 구매의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 경관조명기구 구매(세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성 전기공사)

나. 계약 내용

연번	계약명	계약금액	계약번호 (납품요구번호)	계약업체	납품기한	비고
1	경관조명기구	*********	*********** **************	*******	~‘18.11.30	3자

다. 납품기한 연기요청

○ 변경기간 : 당초 2018.11.30. → 변경 2019.01.15

○ 변경사유 : 건축공정 연기(2018.12.30.)로 납품시기 미도래

○ 지체상금 : 미부과

라. 변경구매 현황

○ 금    액 :**********************

○ 변경사유 : 규격변경에 따라 물량 감소

따로붙임  1. 보고서 2부.

2. 조달구매(변경)요청서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	곽용길		환경설비과장	여인웅		설비부장	12/27 代유병기
협조자	경리과장	이현숙
시행	설비부-18110	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8616	/전송	02-3708-8659	/	yong9345@seoul.go.kr	/	부분공개(5)