문서번호	설비부-18084
결재일자	2018.12.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
곽용길		여인웅	12/27 권오식
협조

『세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성 전기공사』

관급자재(경관조명) 납품기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성 전기공사』

관급자재(경관조명기구) 납품기한 연기 검토 보고

『세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성』시행중 선행공정인 건축공사 연장으로 관급자재인 납품시기가 미도래하여 납품기한을 연장 하고자 합니다.

Ⅰ

공사개요

공 사 명 :『세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성』전기공사

공사규모 : 지하3층/지상1층, 749.64㎡(연면적: 2,998.23㎡)

공사내용 : 수변전설비(750kVA), 비상발전기(300㎾), 전력간선설비 등

공사기한 : 2016. 11. ~ 2018. 12.

도 급 비 : ************************

시 공 사 : (주)동일전기 ******

ⅢⅣ

검토내용

납품기한 연장사유

□ 선행 공정인 건축공사 연장(2018.12.30.)으로 관급자재(경관조명기구) 납품기한 미도래로 납품기한 연장 필요.

관급자재 현황

연번	계약명	계약금액	계약번호 (납품요구,구매관리번호)	계약업체	납품기한	비고
1	경관조명	*********	*********** **************	㈜메이텍시스템	~‘18.11.30	3자

※ 조달수수료 별도

납품기간 연장(금액 변동 없음)

연번	계약명	계약업체	납 품 기 간		비고
			당 초	변 경
1	경관조명	㈜메이텍시스템	‘18.11.30	‘19.01.15

Ⅲ

보고자 의견조치의견

원활한 사업추진을 위해 건축공정에 맞춰 관급자재(경관조명기구)의 납품기한을 연기하는 것이 타당하다고 판단되어 연기하고자 하며, 총무부 납품기한 연기요청 의뢰하고자 함.

지체상금 부과 : 미부과.

붙임 : 감리검토의견서 1부.  끝.