＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	암사아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	사업장폐기물 처리 용역 변경계약 시행(차수별 물량조정)

1. 정수과-11179(`18.12.27)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 사업장폐기물 처리 용역(장기계속단가계약)과 관련하여 물량변동에 따른 차수별 변경계약을 다음과 같이 시행하여 용역관리에 만전을 기하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 암사아리수정수센터 사업장폐기물 처리 용역(장기계속단가계약)

나. 용역기간 : 2017. 7. 1 ~ 2020. 6. 30

다. 총용역 부기금액 : 금2,888,270,000원(금차838,530,000원)

라. 계 약 자 :

- 한일시멘트주식회사, 쌍용양회공업(주), 승기환경(주)

마. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비,수선유지교체비, 수선유지비

바. 변경계약 내역

- 차수별 물량조정 및 금액 변경

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
총용역부기금액 물량		2,888,270,000 (62,000톤)	2,888,270,000 (62,000톤)	변동없음
차수별	1차년도 (`18.7.1-12.31)	838,530,000 (18,000톤)	760,220,520 (16,319톤)	감78,309,480 (감1,681톤)	금차
	2차년도 (`19.1.1-12.31)	1,444,135,000 (31,000톤)	1,522,444,480 (32,681톤)	증78,309,480 (증1,681톤)
	3차년도 (`20.1.1-6.30)	605,605,000 (13,000톤)	605,605,000 (13,000톤)	변동없음

첨 부 : 1. 방침서 1부.

2. 합의서 1부.

3. 설계변경 내역서 2부.  끝.

주무관	안영환		정수과장	하은경		암사아리수정수센터소장	12/27 가길현
협조자	주무관	代이상욱		주무관	변민용
시행	정수과-11216	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131	/
전화	3146-5742	/전송	3146-5707	/	gory303@seoul.go.kr	/	부분공개(6)