문서번호	건축부-19071
결재일자	2018.12.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
김찬유		박범규	12/28 임인구
협 조
	상상산업팀장			고옥희

『서울애니메이션센터 철거공사』

실정보고에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12.

도시기반시설본부

(건  축  부)

『서울애니메이션센터 철거공사』

실정보고에 대한 검토보고

『서울애니메이션센터 철거공사』관련, 가설방음벽 설치에 대한 우선 시공 등에 대한 건설사업관리단으로 부터 실정보고  제출되어 검토보고 드림

1		공사개요

○ 위    치 : 중구 소파로 130,126(예장동 8-20외 3필지)

○ 철거규모 : *****************************

○ 공사기간 : **********************

○ 공 사 비 : *********

○ 건설사업관리용역사 : ㈜혜원까치종합 건축사사무소

○ 시 공 자 : 마도건설환경(주)외 1

2		추 진 경 위

‘18. 10. 01.  : 건설사업관리용역 계약 체결

‘18. 12. 07.  : 철거공사 계약 체결

‘18. 12. 29.  : 가설방음벽 우선 설치 등  실정보고(건설사업관리단 → 건축부)

3		실정보고 내용

관련문서 : 혜원까치 애니센터-2018-040(‘18. 12. 28.), 혜원까치 애니센터-2018-042(‘18. 12. 28.),                             혜원까치 애니센터-2018-036(‘18. 12. 24.)

실정보고 사유

- 가설방음벽 변경 설치에 대한 우선시공 실정보고

- 디지털기록화 작업에 따른 폐기물 선별 현장정리 등 실정보고

관련규정 : 공사계약일반조건 제6절

공사비 검토 : *************

(간접비, 부가세 포함)  〔단위:원〕

실 정 보 고	변 경 전	변 경 후	공사비증·감	비 고
가설방음벽 변경 설치에 따른 우선 시공 실정보고	H형강+RPP방음판 (H 6m, L 322m, H 8m, L 64m)	〔철거전〕 · 전면도로변 : 강관+ RPP방음판 (H 6m, L 91.2m) · 기타구간 :쌍줄비계+ RPP방음판 (H 6m, 8m, L 230.8m, 64m) 〔철거후〕 ·리라초등학교 인접구간 H형강+RPP방음판 (H 8m, L 64m) · 기타구간 : 강관+ RPP방음판 (H 6m, L 322m)	추후 공사비 실정보고 예정	· 철거구조물과 인접 건물사이의 공간이 협소하여 방음벽 기둥인 H형강설치를 위한 오거장비 진입 불가함 · 철거에 따른 소음· 분진관련 주변 민원 방지를 쌍줄 비계에 RPP방음판 우선 시공
디지털기록화 작업에 따른 폐기물선별 현장정리	-	*********	************	******** ***********
가설전기 인입을 위한 임시변압기 설치·해체(임대4개월)	-	*********	***********	******** ***********
남산원 분진방지막 설치 (강관비계 3개월, 240㎡ 분진방지막 P.E 234㎡)	-	*********	***********	****** ***********
합 계	-	**********	************

4		건설사업관리단 검토의견

디지털기록화 작업에 따른 폐기물 선별 현장정리 등 실정보고는 수량 및 단가적용은 적정하게 적용되었으므로 실정보고 승인 및 가설방음벽 변경 설치에 따른 우선 시공 실정보고 승인하는 것이 타당함.

5		처리의견

건설사업관리단의 실정보고 사항에 대하여 승인 통보

설계자문위원회 자문결과에 따라 변동될 수 있음을 통보코자 함.

붙임 : ********** 각 1부.(건설사업관리단).  끝.