문서번호	공공재생과-10358
결재일자	2017.9.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		서울역재생계획팀장	공공재생과장
조선휘		김장성	09/20 홍선기
협 조
	주무관			이석규
	주무관			김지호
	주무관			지우열

- 서울역 일대 도시재생활성화계획 수립 관련 - 시·구 협력회의 개최결과보고(제11차)

2017. 9.

도시재생본부

[공공재생과]

- 서울역 일대 도시재생활성화지역 사업추진관련 -

시·구 협력회의 개최결과보고(제11차)

서울역 일대 도시재생활성화지역 보행문화거리 공사등 사업추진과 관련하여 자치구, 도시재생지원센터, 용역사 등이 함께하는 협력회의를 개최하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		회의개요 및 안건

□ 개  요

○ 일    시 : ‘17. 9. 15.(금)  10:00~11:30

○ 장    소 : 시청 본관 3층 공용회의실

○ 참    석

- 서울시 : 공공재생과장,서울역재생계획팀장, 서울역재생지원팀장

- 중  구 : 도로시설과장, 도로계획팀장, 도심재생과 도시계획팀장

공원녹지과 조경팀장,중림동장, 회현동장

- 한  전 : 한국전력공사 차장

- 센  터 : 코디네이터(신행우, 이기수)

- 용역사 : 박상미과장 ㈜동해종합기술공사

□ 주요 논의안건

□ 대상사업 : 6개 사업 (공정보고)

- 중림로 보행문화거리 조성공사 (도로시설과 심희원팀장)

- 성요셉문화거리외2개소 조성공사(도로시설과 김일팀장)

- 남산옛길 보행중심가로 조성공사 (도로시설과 김일팀장)

- 약현성당 포토존 조성공사외1(공원녹지과 구동근 팀장)

- 남대문시장 진입광장조성 및 지하보도 공간 활용 공사(도로시설과 박흥규팀장)

- 우리동네 가꾸기 조성 공사(중림,회현) (도심재생과 김승주팀장)

○ 2017년 완료사업 공정관리 및 부진사업 공정 만회대책

- 보행문화거리 조성사업 등 공사 추진 일정 관리 적정 검토

- 부진사업에 대한 공정 만회 대책 방안 수립 (예산 조정 방안 등)

Ⅱ		회의결과

□ 총  괄

□ 보행문화거리 및 특화사업 모든 공사 년내 준공 목표 사업추진

□ 2017년도 불용 및 사고이월 최소화

□ 2017년도 예산 운용계획 조정 (세부내역 별첨 예산집행계획 참조)

예산과목	사업명	변경전	변경후	예산 운용 계획 조정 (단위:백만원)			비고
	계	9,057	9,057	1,254	-1,254	내역
사무관리비	지역 거점공간운영비	300	100		-200	공공건축가	공공재생과
	앵커시설등 공공건축가투입	0	200	200		증액	공공재생과
시설비	중림로 보행문화거리	3,254	3,777	523		증액	중구도로시설과
	성요셉문화거리외2	1,443	1,794	351		녹지과추산협조	중구도로시설과
	약현성당 포토존	367	16		-351	성요셉문화거리	중구공원녹지과
	중림동우리동네가꾸기	250	430	180		증액	중구도로시설과
	회현동우리동네가꾸기	250	150		-100	중림동우동가	중구도로시설과
	남대문시장 진입광장 및 지하공간	2,143	2,090		-53	중림로지중화	중구도로시설과
	남촌놀이터 조성공사	1,050	500		-550	중림로지중화	중부공원녹지사업소

□ 공정보고 및 회의 결과

□ 중림로 보행문화거리 조성공사 (공정율 22%)

- 선행사업 한전(서울지역본부) 지중화공사 지연 및 예산부족(12억원)

→  금년 예산조정 (5.23억원) 재배정, 잔여액(6.77억원)은 기배정 사업간 예산 조정추진

→  한국전력 서울지역본부에 한전 지중화 이설 촉구공문 발송요청

□ 성요셉문화거리외2개소 조성공사 (공정율 30%)

- 정상추진 2017.11.30 준공예정

→  10월 한영프로젝트 추진에 지장이 없도록 공사추진 요망

□ 남산옛길 보행중심가로 조성공사 (설계검토중)

- 일방통행로 시행 및 한전지중화 추진 요구에 대한 대책 필요, 남촌놀이터조성공사 사업축소에 대한 주민반발 대책요구 (회현동장)

→ 한전지중화 특별교부금 배정 추진  (공공재생과 적극 협조)

→ 남산옛길 및 남촌놀이터 사업 주민협의회 개최 (10월중 예정)

□ 남대문시장 진입광장조성 및 지하보도 공간 활용 공사 (계약심사준비중)

- 발주를 위한 설계도서 미비 대책요망 (도로시설과장)

→ 광장 특성에 부합되도록 공간을 비우는 평면화 설계 진행(8/3중구청장 요구사항)

→ 설계도서 보완중으로 다음주중 설계도서 일건서류 제출예정 (9/18설계자설명)

□ 우리동네 가꾸기 조성 공사(중림,회현) (설계공정99%)

- 중림동 350백만원에서 추가 사업비 80백만원 요청(도심재생팀장)

→ 금년 예산 확보 80백만원 재배정 예정 (공사 도로시설과, 추산협조 도심재생과)

- 회현동 150백만원으로 동별 사업비 불균형 문제 대책 요망(회현동장)

→ 동 사업은 년차별 추진사업으로 금년 사업에 대하여는 상대적으로 사업량이 많은 동 우선으로 시행된 사항으로 이해바라며, 2018년 사업 적극 발굴하여 동별 균형있는 사업 추진예정 (9/18사업설명)

□ 약현성당 포토존 조성공사외1(공원녹지과 홍순철 팀장)

- 한전 지중화 및 삼성사이버apt후문 녹지 공사 도로시설과 이첩요청(공원녹지과조경팀장)

→ 약현성당 포토존 조성공사 공원녹지과 시행, 한전 지중화 및 삼성사이버아파트 후문 녹지공사는 도로시설과 이첩 (예산 추산협조 공원녹지과)

Ⅲ		행정사항

□ 회의비용

□ 회의용 다과비 지출 : 72,000원

□ 예산과목 : 공공개발 및 공공공간 확충(도시개발), 서울역일대 도시재생사업 추진, 사무관리비

□ 추진계획

□ 시구협력회의 결과보고 관련 부서 송부

첨부  1. 2017년도 예산집행 조정 계획 1부

2. 회의자료 1부.  끝

				2017년도 예산집행계획								2017년 예산현액 : 21,684백만원 본 예산 : 20,864백만원, 사고이월820백만원 (2017. 9. 20. 현재)
구분		주요 사업																		비고
						예산액			집행 현황						예산 검토			본예산 변경 21,624
						본예산	사고이월	예산현액	재배정	원인행위	자치구,sh 재배정		지출	집행잔액	지출예정	검토	조정필요액	변경	조정액
						20,864	820	21,624	21,517	20,867	17,684		12,365	9,259	8,456	0	803	20,821	803
용역		1			계획 수립 용역 총괄 소계	1,186	503	1,689	1,689	1,689	0		913	776	776	0	0	1,689	0
		1-1			도시재생 활성화 실행계획	850	-	850	850	850			510	340	340	0	0	850	0
		1-2			건축자산 진흥구역 관리계획	120	-	120	120	120			51	69	69	0	0	120	0
		1-3			중림동 활성화 실행계획		76	76	76	76			0	76	76	0	0	76	0
		1-4			회현동 일대 지구단위계획	38	-	38	38	38			0	38	38	0	0	38	0
		1-5			보행문화거리 기본 및 실시설계	86	174	260	260	260			260	0	0	0	0	260	0	준공
		1-6			산업생태계 조사	92	-	92	92	92			92	0	0	0	0	92	0	준공
		1-7			서울역 미래비전 수립		253	253	253	253			0	253	253	0	0	253	0
거버 넌스		2			거버넌스 총괄 소계	1,477	0	1,477	1,370	1,270	0		1,102	375	175	0	200	1,277	200
		2-1			손&남 프로젝트 추진	107	-	107	107	107			107	0	0	0	0	107	0
		2-2			계절별 축제	260	-	260	260	260			122	138	138	0	0	260	0
		2-3			한·영 프로젝트	100	-	100	100	100			100	0	0	0	0	100	0
		2-4			도시재생지원센터 운영	550	-	550	550	550			550	0	0	0	0	550	0
		2-5			지역거점공간 운영	300	-	300	193	93			93	207	7	0	200	100	200	공공건축
		2-7			주민공모(아이디어 공모)	20	-	20	20	20			20	0	0	0	0	20	0
		2-8			주민공동체 형성사업(공모)	140	-	140	140	140			110	30	30	0	0	140	0
재생사업	소계	3			재생사업 총괄 소계	18,120	317	18,377	18,377	17,827	17,684		10,347	8,030	7,427	0	603	17,774	603
	앵커	3--1			앵커시설 조성(총괄)소계	8,030	0	8,030	8,030	8,030	8,030		8,030	0	0	0	0	8,030	0
		3-1-1			중림동(성요셉아파트앞 창고시설)	2,230	-	2,230	2,230	2,230	2,230		2,230	0	0	0	0	2,230	0	SH
		3-1-2			서계동(서계동 도시계획시설 부지)	4,000	-	4,000	4,000	4,000	4,000		4,000	0	0	0	0	4,000	0	SH
		3-1-3			회현동(회현동 건축자산)	1,800	-	1,800	1,800	1,800	1,800		1,800	0	0	0	0	1,800	0	SH
	거리	3-2			보행문화거리 조성(총괄)	6,997	317	7,314	7,314	6,764	6,764		2,317	4,997	4,447	0	550	6,764	550
		3-2-1			중림로 보행문화거리 조성	2,937	317	3,254	3,254	3,254	3,254		2,317	937	937		0	3,254	0
		3-2-2			성요셉문화거리 조성외2	1,443	-	1,443	1,443	1,443	1,443			1,443	1,443		0	1,443	0	중구
		3-2-3			약현성당내 포토존 조성외1	367	-	367	367	367	367			367	367		0	367	0	중구
		3-2-4			국립극단길 조성	500	-	500	500	500	500			500	500		0	500	0	용산구
		3-2-5			남산옛길 보행중심가로 조성	700	-	700	700	700	700			700	700		0	700	0	중구
		3-2-6			남촌 놀이터 조성	1,050	-	1,050	1,050	500	500			1,050	500	0	550	500	550	중구
	마을	3-3			우리동네가꾸기(총괄)	840	0	840	840	840	840		0	840	840	0	0	840	0
		3-3-1			중림동 우리동네가꾸기	250	-	250	250	250	350		0	250	250		0	50	100	중구
		3-3-2			서계동 우리동네가꾸기	340	-	340	340	340	340		0	340	340		0	340	0	용산구
		3-3-3			회현동 우리동네가꾸기	250	-	250	250	250	150		0	250	250		0	150	-100	중구
	특화 사업	3-4			특화사업(총괄)	2,253	0	2,193	2,193	2,193	2,050		0	2,193	2,140	0	53	2,140	53
		3-4-1			서계동 전망데크 및 아트월	0	-	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
		3-4-2			서계동 구릉지 테마계단	50	-	50	50	50	50		0	50	50		0	50	0	용산구
		3-4-3			남대문시장 진입광장 조성	1,066	-	1,066	1,066	1,066	1,000		0	1,066	1,045		21	1,045	21	중구
		3-4-4			남대문시장 지하공간개발	1,077	-	1,077	1,077	1,077	1,000		0	1,077	1,045		32	1,045	32	중구
		3-4-4			서계동 거점공사	60		60	60	60	30		51	9	9	0	0	60	0	감나무집 중림창고
기타		4			기타 총괄 소계	81	0	81	81	81	0		3	78	78	0	0	81	0	0
		4-1			기간제근로자등보수	6	-	6	6	6			3	3	3		0	6	0
		4-2			시책추진업무추진비	8	-	8	8	8			0	8	8		0	8	0
		4-3			시설부대비	67	-	67	67	67			0	67	67		0	67	0	중구