의원 요구 자료 제출

시 행	토목부-20996
결재일자	2017.10.12.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	건설총괄부장

주무관		토목설계과장	토목부장	시설국장		결재
윤창렬		여용석	김영수	10/12 류훈
협 조

제 목	행정사무감사 요구자료 제출(요구번호 20번, 주찬식 의원, 도시안전건설위원회)

행정사무감사 요구자료를 따로붙임과 같이 제출코자 합니다.

따로붙임 : 행정사무감사 요구자료 1부.  끝.

이곳에 본문을 입력하세요

주찬식 의원(도시안전건설위원회, 자유한국당)

23. 대청지하차도 설치공사 실시설계 관련

1) 사업개요[목적/규모/사업기간/사업비(재원분담 내역 포함)]

2) 연도별 예산편성 및 집행내역

3) 사업계획 시 ~ 현재까지 추진실적

4) 타당성 재조사 사유, 추진현황 및 주요내용

1) 사업개요[목적/규모/사업기간/사업비(재원분담 내역 포함)]

○ 목적 : 삼성의료원 교차로에 지하차도를 설치하여 양재대로 자동차 전용도로의 기능을 개선하고 교통처리 원활 도모

○ 사업기간 : 2010. 3. ~ 2021.12.31.

○ 사업규모

- 대청지하차도 폭4차로 연장460m(Box 180m, U-type 280m)

- 교차로 주변 접속도로 정비 200m

○ 총사업비 : 599억원(전액 시비)

2) 연도별 예산편성 및 집행내역

(단위 : 백만원)

구 분	2014년		2015년		2016년		2017년		비고
	예 산	집 행	예 산	집 행	예 산	집 행	예 산	집 행
합 계	300	0	0	300	557	171	0	172	강남순환도시고속도로 8공구 예산 사용
설계비	300	0	0	300	557	171	0	172
공사비	0	0	0	0	0	0	0	0
감리비	0	0	0	0	0	0	0	0
부대비

3) 사업계획 시 ~ 현재까지 추진실적

○ 2010. 03. ~ 2012. 02	: 양재대로 지하화 타당성 조사 및 기본계획 용역 시행

○ 2011. 10. 06 : 투자 심사

○ 2011. 11. 03 : 투자 심사 재심의(부적정)

○ 2012. 10. 30 : 투자심사 재심의(적정, 사업타당성 인정)

- 지하차도 2개소 (폭4차로, 대모1,160m, 대청440m, 사업비2,029억원)

○ 2014. 10. 06 : 대청지하차도 설치공사 실시설계 착수

○ 2015. 08. 07 : 설계자문회의(1차)

○ 2016. 03. 23 ~ 04. 05 : 주민공람 공고

○ 2016. 07. 28 : 설계자문회의(2차)

○ 2016. 10. 12 : 서울시민디자인심의

○ 2016. 7.28. : 설계자문회의(2차)

○ 2016.10.27. : 서울시민디자인 심의(재심의)

○ 2016.11.25. : 특정제품(공법)선정 심의

○ 2017. 2.20. : 타당성조사 업무약정 체결

○ 2017. 5.22. : 설계VE

○ 2017.09.29. : 투자심사 재심사

4) 타당성 재조사 사유, 추진현황 및 주요내용

○ 타당성 재조사 사유

- 사업비 증액(936억원 : 2,029억원 → 2,965억원)으로 인한 재조사

○ 추진현황

- 2017. 2.20. : 타당성조사 업무약정 체결 (서울시↔(재)한국지방행정연구원)

- 2017. 8.19. : 타당성 재조사 완료 ((재)한국지방행정연구원)

○ 주요내용

- 대상사업 : 양재대로 지하화 사업 타당성 재조사

- 규    모 : 지하차도 신설(대모1,174m, 대청460m), 일원지하차도 구조개선470m

- 조사사유 : 사업비 증액 (936억 원 : 2,029억 원 → 2,965억 원)

- 조사기관 : (재)한국지방행정연구원 (수수료 : 130백만원)

- 조사기간 : 2017. 2.20. ~ 2017. 8.19.

- 조사결과 : 주요간선도로의 교통혼잡 완화 효과가 있는 것으로 판단

끝.

작성자	기관명 (부 서 명)	직 위	성 명
	도시기반시설본부 (토목부)	담당사무관	여용석
	☎ 3708-2586	담당자	윤창렬
	작 성 일 : 2017. 10.