문서번호	동북권사업단-10067
결재일자	2017.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	서울아레나팀장	동북권사업반장	동북권사업단장		지역발전본부장
강경구	이유국	한병준	이정화		10/13 정수용
협 조

[대중음악관 건립]

타당성조사 및 기본계획 수립 용역변경(취소) 계획

2017. 10.

지역발전본부

(동북권사업단)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

[대중음악관 건립]

타당성조사 및 기본계획 수립 용역 변경(취소) 계획

창동 일대 대중음악관 건립 타당성조사 및 기본계획 수립 용역의 유찰(무응찰)에 따른 검토 결과, 용역 변경(취소) 계획에 대한 보고임.

□ 용역개요

○ 과 업 명 : 대중음악관 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역

○ 용역기간 : 착수일로부터 10개월

○ 용 역 비 : 97,600천원

○ 입찰방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

○ 과업내용

- 대중음악관 건립 필요성 및 현황조사 분석

- 건립 기획업무 및 계획 설계, 건립비 산출

- 타당성 조사 및 경제성 분석, 운영 계획(안) 제시

□ 추진경위

○ ’17.06.28.	: 타당성조사 및 기본계획 용역 추진계획 방침

○ ’17.07.13.	: 용역 시행 방침 수립

○ ’17.08.09~21.	: 입찰공고 의뢰

○ ’17.08.22.	: 무응찰 통보

○ ’17.09.21.	: 입찰결과(무응찰)에 따른 대책회의

- 참석 : 이동연 교수, 진린 상무, 신경제사업과장(도봉구)

○ ’17.09.25.	: 창동일대 문화예술거점 용역보고

- 대중음악관의 사업타당성 등 종합 검토결과, 서울아레나 건물내 입지 제안

□ 변경(취소)사유

○ 용역 유찰에 따른 대책회의에서 제시된 대중음악관 건립 타당성조사 및 기본계획에서 제안된 후보 부지와 기능측면 검토 결과

- (입지) 대중음악관 건립이 가능한 후보부지는 사진․로봇박물관이 기 반영되어 있는 등 서울아레나 부지 외 대체부지가 없는 실정임.

- (기능) 대중음악관은 아카이브(Archive)의 상설전시와 아티스트 공연 전시 등 기획전시 및 판매 기능이 서울아레나와 한 공간에 입지해야 공연과 시너지 효과 기대

○ 대책회의에서 논의된 대중음악관 건립용역을 시설 위주보다 콘텐츠 및 프로그램 등 기본구상 위주로 과업내용 변경시 현재 과업중인『창동 일대 문화예술 거점 조성방안 수립』용역과 과업내용이 중복된 측면이 있음

○*******************************************************************************************************

○ 금회 과업은 취소하고 향후 대중음악관 입지가 확정되고 사업이 구체화 되는 시점에 필요시 입지, 콘텐츠, 프로그램 및 사업 규모 등에 대해 과업시행 방안 검토

□ 조치계획

○ ************************************  ************************

○ 과업취소에 따른 용역비(120백만원)는 향후 추경계획이 있을 경우 감추경 조치.

붙임  입찰결과(무응찰)에 따른 대책회의 개최 결과 1부