문서번호	인생이모작지원과-12211
결재일자	2017.10.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		인생이모작시설팀장	인생이모작지원과장
양홍모		김동은	10/26 이성은
협조
	인생이모작정책팀장		김세정

50플러스 남부캠퍼스 시설물 인수인계 보고

복지본부

인생이모작지원과

50플러스 남부캠퍼스 시설물 인수인계 보고

‘50플러스 남부캠퍼스’가 준공되어 원만한 시설 운영을 위하여 운영주체인 서울시 50+재단 및 구로구에 시설물 인수인계를 아래와 같이 실시하고자 함.

□ 사업개요

○ 사업명 : 서울시 50플러스 캠퍼스 건립 공사

○ 대지 위치 : 구로구 오류로 36-25(오류동156-61,193,194)

- 대지면적 3,300㎡

○ 규모․용도 : 지하3층, 지상4층, 50플러스 캠퍼스 및 수영장

- 연면적 : 5,714㎡, 주차대수 : 37대

○ 사업기간 : 2013.8.~2017.9.

○ 총사업비 : 28,584백만원(도시개발 특별회계, 토지매입비 포함)

- 건축비 : 17,179백만원

□ 그간 추진 현황

○ 설계 : '13.12. ~ '15. 7.

○ 착공 : '16. 1. 7.

○ 입주 관련 T.F 운영 : '16.12. ~ '17. 9.

- 참석 : 인생이모작지원과, 도기본, 50+재단, 구로구(시공사 참여)

- 운영 분야 : 시설물 개선 요구, 하자점검, 입주준비 등

○ 준공 전 사용자 사전점검 실시 : '17.8.11  / 9.8

○ 50플러스 남부캠퍼스 수영장 관리․운영 협약 체결 : '17.8.30.

○ 준공 : '17.8.31.

□ 시설물 인수인계 현황

○ 준공에 따른 시설물 인수인계(도기본 ➡ 인생이모작지원과)

- 시설물 인수인계 실시('17.9.25.)

*****************************************

○ 운영주체에 시설물 인수인계(인생이모작지원과 ➡ 50+재단, 구로구)

- 운영주체에 인수인계('17.10.)

*********************************************

- 안전한 시설물 유지관리 관련 '18년 재단 출연금 확보

□UD보완사항 개관 전 완료(안내사인, 비상벨, 계단 미끄럼방지 등)

□시설물 안전점검비(년 2회 하자점검 및 안전점검 실시)

※ 시설물 운영 교육 실시('17. 9. 시공사 ➡ 50+재단, 구로구)

□ 향후계획

○ 준공에 따른 행정 처리

- 건축물 대장 등재(구로구, '17.10.)

- 취득세 신고(구로구) 및 등기부등본(건축물) 신청('17.10.)

- 토지대금 정산(SH택지계획부-3967, ’17.9.15)

□천왕2지구 준공(’18.12월 예정) 이후 확정측량 실시 후 정산

○ 개관준비 : 2017. 11.~

********************

*************************