문서번호	토목부-24071
결재일자	2017.11.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	도시고속도로과장	토목부장	시설국장		도시기반시설본부장
백종임	명경출	김영수	류훈		11/17 고인석
협 조

시설공사 발주계획 보고

(한남2고가 철거 및 중앙버스전용차로 설치공사)

2017. 11.

도시기반시설본부

(토  목  부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	■	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

시설공사 발주계획 보고

- 한남2고가 철거 및 중앙버스전용차로 설치공사 -

도시미관 저해·노후된 고가차도를 철거하여 도시미관을 향상하고,  대중교통 이용 활성화와 편의를 도모하고자 추진하는「한남2고가 철거 및 중앙버스전용차로 설치공사」의 발주계획에 관한 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 고가차도 관리계획 수립(행정2부시장 방침, ‘16.8.11.)

○ 한남대로 BRT 사업시행계획 수립(행정1부시장 방침, ‘16.9.1.)

Ⅱ		사 업 개 요

사업명	한남2고가 철거 및 중앙버스전용차로 설치공사
구 분	한남2고가차도 철거	한남대로 BRT
위 치	용산구 한남2고가	용산구 한남1고가 남단 ~ 서초구 한남대교 남단
규 모	고가차도 철거 폭15m, 연장341m	중앙버스차로 2km(중앙정류소 3개소)
기 간	2017.12. ~ 2018.06.
사업비	100억원(공사비61, 관급비13, 폐기물8, 이전비10, 감리8) (※ 전기공사비 7억원 미포함, 전기공사 별도 시행)

Ⅲ		예산 현황

○ 2017년 본예산(전액 시비)

(단위 : 백만원)

구분(내용)		계	한남2고가 철거	한남대로 BRT	비고
본부(재배정)예산		12,096	5,100	6,996
	공사비	11,800	5,000	6,800
	감리비	296	100	196

※ 예산과목

- 한남2고가 철거 : 도로계획과, 도로건설, 간선도로망확충, 고가차도 철거,

시설비 및 부대비, 시설비

- 한남대로 BRT  : 교통운영과, 도로시교통체계 및 소통개선, 버스서비스 이용제고,

한남대로 중앙버스전용차로 설치, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅳ		추진경위

○ '16. 8.11  : 고가차도 관리계획 수립

○ '16. 9. 1  : 한남대로 BRT 사업시행계획 수립

○ '17. 4~9  : 한남2고가 철거 실시설계 용역 시행(토목부)

○ '17. 1~10 : 한남대로 BRT 기본 및 실시설계 용역 시행(교통운영과)

○ '17. 7. 5  : 기본설계 주민설명회 개최

○ '17. 9. 26 : 서울지방경찰청 교통규제 심의완료

○ '17. 10.25 : 공사중 교통소통대책 자문완료

○ '17. 10.27 : 공사 계약심사 완료

○ '17. 11. 1 : 한남대로 BRT 설치공사 시행요청(교통운영과)

Ⅴ		공사 및 용역 발주방법 검토

□ 공사 통합발주에 관한 사항

○ 통합발주 대상

구 분	한남2고가차도 철거	한남대로 BRT	비고
위 치	용산구 한남2고가	용산구 한남1고가 남단 ~ 서초구 한남대교 남단
기 간	2017.12. ~ 2018.06.

○ 상기 공사는 공사구간 및 시기가 동일하여 병행시행함으로서 중복투자 방지, 공기 단축, 예산절감 등 시민불편 최소화를 위해 통합 발주

※ 통합발주시 약13억원 절감(분리발주 102억원, 통합발주 89억원)

□ 공사입찰 및 계약방법 검토 (추정가격 : 53억원)

○ 입찰방법 : 제한경쟁입찰(시공실적)

- 고가차도 철거 경험이 필요한 특수한 현장으로 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제4장 제한입찰 운영요령에 의한 실적제한(시공실적의 1/3의 규모)

○ 계약방법 : 주계약자 공동도급

1. 주계약자 공동도급 검토

- 본 공사는 추정가격 100억원 미만공사로서 주계약자 공동도급 대상

- 공종별 비율은 철거공사(31.37%), 포장공사(10.10%), 조경공(1.12%), 토공사 등(57.41%)으로 구성됨.

-「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제8장 주계약자 공동도급 운영  요령에서 시공실적으로 입찰참가자격을 제한하는 경우 발주하려는 공사와 동일한 실적(종합공사 실적)으로 제한하고, 주계약자가 해당공사 입찰공고에서 제한된 시공실적 이상을 보유하고 있어야 입찰참가가 가능하다고 규정함.

- 본 공사는 혼잡한 도심지내에서 고가차도를 단계별로 철거해야 하는 특수한 상황으로 철거 유경험자의 시공실적 확보가 필요하므로 철거공사를 주계약자 시공범위에 포함하여 주계약자 공동도급방식으로 시행함이 바람직함.

2. 공동수급체 시공비율

- 주계약자(토목공사업) : 89.90%

- 부계약자(포장공사업) : 10.10%

□ 시설공사 발주계획

○ 발주시기 : '17. 11월

○ 발주방법 : 자체 발주

○ 입찰참가자격

-「건설산업기본법」에 의한 종합공사의 업종 토목공사업(또는 토목건축공사업)으로 등록한 업체와 전문공사의 업종 포장공사업 면허를 등록한 업체가 주계약자 공동도급방식에 의한 공동수급체를 구성하여 입찰에 참가하여야 함.

- 입찰공고일 기준 최근 5년 이내에 준공한 단일(1건) 공사로서 도로교량 철거 실적이 500백만원 이상인 업체.

Ⅵ		향후 추진계획

○ ‘17.11월 : 공사 발주(긴급공고)

○ ‘17.12월 : 공사 계약 및 착공

○ ‘18.06월 : 공사준공 및 개통

Ⅶ		행정사항

○ 공사 홍보, 고가철거 및 BRT 추진관련 민원 처리 : 도로계획과, 교통운영과

○ 공사시행 관련 민원 처리	: 토목부

○ 예산관련 업무(사고․명시이월 등)          : 도로계획과, 교통운영과

붙임 1. 공사설명서 1부.

2. 공사입찰 및 계약방법 검토 1부.

3. 위치도 1부.  끝.