	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	설계용역 준공기한 연기 요청(고가철거공사)

1. 토목부-25703호(2017.12.7.)와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 『한남2고가 및 구로고가차도 철거공사 실시설계』용역에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 한남2고가 및 구로고가차도 철거공사 실시설계 용역

나. 용역개요 : 고가차도 철거 2개소

다. 계 약 자 : ㈜이산, ㈜태조엔지니어링, ㈜서울화인

라. 변경 내역

구 분	당 초	변 경	증 / 감	비 고
계약금액	374,850,000,	374,850,000	-	변경없음
계약기간	2017. 4. 11. ~ 2017. 12. 31.	2017. 4. 11. ~ 2018.2.28.	증	기간연장

마. 예산과목

- 도로건설, 간선도로망확충(도시개발특별), 고가차도 철거, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

붙임 : 1. 준공기한 연기 보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 합의각서 및 예정공정표(변경) 1부.  끝.

	토목부장
주무관	윤창렬		토목설계과장	여용석		토목부장	12/11 김영수
협조자
시행	토목부-25876	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2586	/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개