문서번호	토목부-26493
결재일자	2017.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	토목설계과장	토목부장		시설국장
윤창렬	여용석	김영수		12/15 류훈
협 조

준공기한 연기보고

[제2자유로 종점부 입체화 실시설계 용역]

2017. 12

도시기반시설본부

(토목부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

준 공 기 한   연 기 보 고

[제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 실시설계 용역]

현재 수행 중인 『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 실시설계 』용역의 절대공기 부족에 따른 준공기한 연기 보고임.

※ 준공기한 : 당초)2017.12.31. → 변경)2018.3.30.(증3개월)

용역 개요

◦ 용 역 명 : 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 실시설계용역

◦ 위    치 : 서울특별시 마포구 상암동(월드컵로)

◦ 용역내용

- 구룡사거리 : 구룡교 확장 폭6m, 연장300m

- 월드컵파크3단지 및 디지털미디어입구 교차로 : 신호연동화

- 월드컵경기장 교차로 : 지하차도 신설 폭4차로, 연장540m

- 월드컵로 : 월드컵파크3단지교차로~월드컵경기장교차로(양측 2차로 확장)

◦ 용역기간 : 2017.5.10. ~ 2017.12.31.

◦ 용 역 비 : 1,247,900,000원

◦ 용 역 사 : ㈜유신, ㈜동일기술공사, ㈜진우엔지니어링코리아, ㈜ 도진엔지니어링

추진현황 (공정률 : 72.5%)

◦ '12.12.14 : 광역교통개선대책 확정(난지도길 입체화 반영)

◦ '13.10.08 : 투자심사(적정)

◦ '14.12.31 : 기본설계 착수

◦ '17.01.31 : 기본설계 완료

◦ '17.05.10 : 실시설계 착수

◦ '17.09.01 : 설계자문회의(1차)

◦ '17.11.13 : 특정공법심의

보고내용

가. 용역비 및 용역기간 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 / 감	비 고
용 역 비	1,247,900,000	1,247,900,000	-	변경없음
용역기간	′17.5.10.~′17.12.31.	′17.5.10.~′18.3.30.	증)3개월

나. 준공기한 연기 사유

◦ 관련기관 협의 지연 및 추가협의와 설계VE 등 행정절차 처리를 위한 절대공기 부족

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

조치의견

◦ 관련기관 협의 지연 및 추가협의와 설계VE 등 행정절차 처리를 위한 절대공기 부족으로 본 설계용역 준공기한 연기

향후계획

◦ '18.02. : 설계VE

붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 공문서 사본(합의각서 포함) 1부.   끝.