	서울특별시도시기반시설본부
수신	경기도지사(하천과장)
(경유)
제목	제2자유로 종점부 입체화 실시설계 관련 업무 협의

1. 경기도 하천과-18427호(2017. 9. 29)와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인‘제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 실시설계’용역의 업무 협의시 귀청에서 ‘향동천은 서울지방국토관리청에서 수립중인 한강하류권역 하천기본계획(향동천) 대상 하천으로 현재 홍수량 산정 용역이 진행되고 있음에 따라 서울청과 별도 협의하고, 협의 결과에 따라 계획 홍수량 변경 등 수위 영향을 최종 검토하여 재협의’하도록 통보되었습니다

3. 이에 따라 서울청과 협의 결과 현재 국토부의‘전국 하천유역 홍수량 산정(한강권역)’용역이 진행중(2018.4 완료)이므로 현재로서는 향동천에 대한 계획홍수량 변경 협의가 어려운 실정이라는 답변을 들었습니다.

4. 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 실시설계 용역은 2018.3.30. 준공 예정이므로 2018.4 완료 예정인 서울청 용역결과를 반영하는 것은 시기적으로 불가하며, 그로 인하여 설계 지연이 우려되고 있습니다

5. 또한, 상기 홍수량 산정 용역결과 홍수량이 변경된다 하더라도 구룡교의 높이 수정은 불가하므로 설계를 진행하되, 서울청의 용역이 완료되면‘공사전 재협의’하는 것으로 사업을 추진하고자 합니다.

6. 본 사업은 파주운정3 택지개발사업 광역교통개선대책에 반영된 사업으로 사업지연시 극심한 민원의 우려가 있는 바, 귀 도의 적극적인 협조를 당부드립니다.

붙임 : 1. 노선도 1부.

2. 교량 종평면도 1부.

3. 수리.수문 조사분석 1부.   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	윤창렬		토목설계과장	여용석		토목부장	12/15 김영수
협조자
시행	토목부-26505	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2586	/전송	02-3708-2599	/		/	부분공개(5)