	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	설계용역 준공기한 연기 요청(제2자유로 종점부 입체화)

1. 토목부-26493호(2017.12.15.)와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 실시설계』용역에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 실시설계 용역

나. 용역개요

- 구룡사거리 : 구룡교 확장 폭6m, 연장300m

- 월드컵파크3단지 및 디지털미디어입구 교차로 : 신호연동화

- 월드컵경기장 교차로 : 지하차도 신설 폭4차로, 연장540m

- 월드컵로 : 월드컵파크3단지교차로~월드컵경기장교차로(양측 2차로 확장)

다. 계 약 자 : ㈜유신, ㈜동일기술공사, ㈜진우엔지니어링코리아, ㈜도진엔지니어링

라. 변경 내역

구 분	당 초	변 경	증 / 감	비 고
계약금액	1,247,900,000	1,247,900,000	-	변경없음
계약기간	2017. 5. 10. ~ 2017. 12. 31.	2017. 5. 10. ~ 2018. 3. 30.	증	기간연장

마. 예산과목

- 도로건설, 간선도로망확충(교통사업특별회계), 제2자유로 종점부(난지도길)입체화,

시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

붙임 : 1. 준공기한 연기 보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 준공기한 연기 요청 공문(합의각서 포함) 1부.  끝.

	토목부장
주무관	윤창렬		토목설계과장	여용석		토목부장	12/15 김영수
협조자
시행	토목부-26546	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2586	/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개