문서번호	토목부-285
결재일자	2018.1.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목설계과장	토목부장
윤창렬		여용석	01/05 代이동훈
협조

준공기한 연기보고

[제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 실시설계 건설사업(설계감리)용역]

2018. 1.

도시기반시설본부

(토목부)

준 공 기 한   연 기 보 고

[제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 실시설계 건설사업(설계감리)용역]

용역개요

○ 용역명 : 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 실시설계 건설사업(설계감리)용역

○ 위  치 : 서울특별시 마포구 상암동(월드컵로)

○ 규  모

- 구룡사거리 : 구룡교 확장 폭6m, 연장300m

- 월드컵파크3단지 및 디지털미디어입구 교차로 : 신호연동화

- 월드컵경기장 교차로 : 지하차도 신설 폭4차로, 연장540m

○ 기  간 : 2017.5.24. ~ 2018.1.18.

○ 용역비 : 122,599,000원

○ 용역사 : ㈜대한콘설탄트   대표  박광하

용역기한 연기

구 분	당 초	변 경
용역기간	2017.5.24.~2018.1.18.	2017.5.24.~2018.5.31.
도 급 비	122,599,000원	변경없음

연기에 따른 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

지체상금 : 미부과

연기사유

○ 설계감리중인 「제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 실시설계」용역이 관련기관 협의 지연 및 추가협의와 설계VE 등 행정절차 처리를 위하여 설계용역 준공기한이 연기됨에 따라 이와 연계하여 건설사업(설계감리) 준공기한 연기가 불가피함.

조치의견

○ 위 사유로 인하여 제2자유로 입체화 실시설계 건설사업(설계감리)용역을 연기조치하여 업무추진에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 1) 준공기한 연기의뢰서 1부.

2) 준공기한 연기 요청 공문서 (예정공정표,합의각서 포함) 1부.   끝.