문서번호	동물기획과-166
결재일자	2018.1.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	동물기획과장	동물원장		서울대공원장
장현주	김보숙	어경연		01/12 송천헌
협 조
	시설과장		오임석
	동물복지1과장		김영섭
	주무관		강경숙

조류사 개선 공정 점검 회의 결과보고(11차)

2018. 1.

서울대공원

(동물기획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

조류사 개선 공정 점검 회의 결과보고(11차)

개방형 조류사에 대한 조류독감 예방 및 안전보수 공사를 원활히 추진하기 위해 11차 공정 점검 회의를 개최하고 그 결과를 보고함

1		11차 회의 개요

□ 일시: 2018.1.8.(월) 15:00~16:00

□ 장소: 서울대공원 회의실

□ 참석: 14명

- 관리부: 대공원장, 관리부장, 시설과장, 배진수, 한상길, 이강호, 이옥하

- 동물원: 동물기획과장, 동물복지1과장, 강경숙, 황근석, 이종화, 송종훈, 장현주

□ 주요 안건

- 공정 내역 점검(조류격리치료사, 작은물새장, 큰물새장, 공작마을)

- 공정 일정 재조정(큰물새장 격리칸)

- 기타 안건

2		회의 결과

□ 조류사 공사 추진 현황

○ 공정 내역 점검

- 작은물새장: 철골 공장 제작 중 → 1월 15일경 철골 현장 반입 예정

- 큰물새장 개폐형 격리방사장: 추가 격리방사장(6개) 예정지 공사구간 지장수목은 조경과와 협의하여 제거·이식 예정

- 큰물새장 관람방사장 및 공작마을: 원활한 공사 진행을 위해 철망 수입 절차 우선 이행

○ 큰물새장 개폐형 격리방사장 추가설치 공사 일시 중단(1개월)

- 사유: 공사관계자 거주지 인근인 천안 고병원성 AI 발생, 포천 등 전국 확산 추이 확인

- 공사 중지 기간 동안 도장 작업, 골조 기초 부분, 상하수도 등 현장 재검토

‣조치 사항: 1달간 공사 중지(2018.1.11.~2.11.) 조치 ⇒ 공사기한 연장 검토(2018.3.15.→4.15.)

○ 기타

- 조류 번식기 전 조류 개체인식링을 부착하고 성별검사를 통해 암수 분리 사육 예정

- 비닐하우스 처리: 동물복지2과, 종보전연구실과 함께 협의하여 결정할 예정

- 소독 작업 용이하도록 사육관리실 앞 자갈 부설 조치

□ 간부 요청 사항

○ 대공원장

- AI 방제를 최우선 목표로 하고 방역 활동 철저히 진행

- 조류의 스트레스를 줄이기 위해 격리방사장 주변을 차단할 수 있도록 식재 조치 및 차단띠 설치

- 격리방사장에 물이 얼지 않도록 배수 처리를 잘 할 것

○ 관리부장

- 공기를 맞추기 위해 무리하게 추진하지 말고, AI 방제에 신경쓰며 진행할 것

- 공사 중간 자재 변경과 같은 상황이 발생하지 않도록 설계 단계부터 충분한 검토 회의를 거칠 것

3		향후 계획

□ 12차 공정 점검 회의 개최

- 날짜: 2018.1.29(월)

※ 회의 시간 추후 공지

- 장소: 서울대공원 회의실

- 주요 안건: 공정 내역 점검

□ 협조 사항: 부서간 긴밀한 협의 지속(시설과-동물기획과-동물복지1과-종보전연구실)

붙임 11차 회의자료 1부.  끝.