문서번호	동물기획과-1107
결재일자	2018.3.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	동물기획과장	동물원장		서울대공원장
장현주	代강경숙	어경연		03/12 송천헌
협 조
	시설과장		오임석
	동물복지1과장		代김완선
	주무관		김지은

조류사 개선 공정 점검 회의 결과보고(12차)

2018. 3.

서울대공원

(동물기획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

조류사 개선 공정 점검 회의 결과보고(12차)

개방형 조류사에 대한 조류독감 예방 및 안전보수 공사를 원활히 추진하기 위해 12차 공정 점검 회의를 개최하고 그 결과를 보고함

1		12차 회의 개요

□ 일시: 2018.2.5.(월) 10:00~11:00

□ 장소: 서울대공원 회의실

□ 참석: 16명

- 관리부: 대공원장, 관리부장, 시설과장, 배진수, 한상길, 이강호, 이옥하

- 동물원: 동물원장, 동물기획과장, 동물복지1과장, 김지은, 최종운, 김규현, 송종훈, 김호진, 장현주

□ 주요 안건

- 공정 내역 점검(조류격리치료사, 작은물새장, 큰물새장, 공작마을)

- 방역 상황 검토

- 기타 안건

2		회의 결과

□ 조류사 공사 추진 현황

○ 공정 내역 점검

- 조류격리치료사

▫현재 한파로 건식공사 진행, 날씨가 풀리면 콘크리트 타설 및 큰공사 마무리 예정

▫천막 지붕의 수동 개폐가 어려운 바 설치 및 운영이 기술적으로 용이한 방법 검토 필요

- 작은물새장: 현장 작업 시작(2.8.~), 설 연휴 후 창호설치 및 마감공사 예정

- 큰물새장 개폐형 격리방사장: 현장과 조율해 설 연휴 후 공사 재개

- 큰물새장 관람방사장 및 공작마을: 철망 수입 절차 진행

○ 방역 사항

- 최근 AI 발생 현황에 따른 소독 및 예찰 추진

- 철새 이동에 따른 AI 차단 방역 협조 요청

○ 큰물새장 개폐형 격리방사장 추가설치 공사

- 현안

· 당초 긴급상황 대비 큰물새장 조류 전체를 안전하게 수용하기 위해 6개칸 추가 설치를 긴급 요청.

※ 동물기획과,동물복지1과 긴급 요청 ⇒ 시설과 (‘17.11.16. 8차 공정회의)

· 시설과에서는 긴급사항 감안 우선 구두지시 후 설계변경(‘17.12.21.) 하여 관련 자재(철골) 구매 제작(도장 미시행) 완료.

· 당시에는 미처 예견치 못했던 도로 저촉 및 거대 구조물로 인한 주변 경관저해 등 문제점이 도출로 계획변경(‘18.2.5.)

※ 동물기획과,동물복지1과 긴급 요청 ⇒ 시설과 (‘18.2.5. 12차 공정회의)

· 격리칸 6개 → 4개로 축소(-2개소)

· 계획 변경에 따른 기 구매 제작한 철골자재(약15백만원)에 대한 처리계획 수립 필요

▸조치 방안

· 기 구매 자재는 다른 조류사 등 동물사 시설개선을 위한 공사 자재로 활용 할 방안을 조속 검토하여 시설과에 통보.

⇒ 검토부서 : 동물기획과,동물복지1과

○ 기타

- 큰물새장 개체수 정리: 13종 109수만 남길 예정

□ 간부 요청 사항

○ 대공원장

- 큰물새장 격리방사장 도로 쪽 나무가 제거되어 격리칸 차폐용 식재 필요

- 기 시공사에서 6개 추가에 대한 자재 제작이 완료된 상태로 축소되는 2개소의 철골 자재를 다른 동물사에 대체 사용하는 것을 충분히 검토

- 격리칸의 주요 기능을 항상 염두하고 격리 이외의 기능(창고, 부화장 등) 배제

- 사육사실 위치: 격리방사장 및 야외방사장 관리가 용이한 최적의 위치 선정

- 조류 개체수 계획대로 감소토록 추진

- 향후 리모델링시 대공원 최고 전문가, 외부 전문가와 함께 검토하고 방사장뿐만 아니라 서식지의 기능, 특성, 동물의 생활사 감안하여 기본 계획 충실히 수립할 것

- 시설물, 공사 관련 시설, 조경 관련 당해 정보 공유 활성화

- 큰물새장 대표종(황새, 두루미)의 서식 환경 잘 반영하여 공사 진행

○ 관리부장

- 공사시 건축물뿐만 아니라 조경도 함께 고려

- 기본 항목이 누락되지 않도록 설계 단계부터 세심히 내용을 검토해 공사에 차질이 없도록 진행

○ 시설과장

- 설계 단계에서 부서간 면밀히 협의하고 검토하여 동물원에서는 이후 변경사항 발생하지 않도록 당부하며 불가피할 경우 방침 수립

3		향후 계획

□ 13차 공정 점검 회의 개최

- 날짜: 2018.3.19(월)

※ 회의 시간 추후 공지

- 장소: 서울대공원 회의실

- 주요 안건: 공정 내역 점검

□ 협조 사항: 부서간 긴밀한 협의 지속(시설과-동물기획과-동물복지1과-종보전연구실)

붙임 12차 회의자료 1부.  끝.