문서번호	시설과-1302
결재일자	2018.3.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	시설과장
김철수		기효상	03/28 김재균
협조

『남산공원내 지하매설물 일제조사』

최종 설계변경 보고

2018. 3

『남산공원내 지하매설물 일제조사』

최 종 설 계 변 경 보 고

『남산공원내 지하매설물 일제조사 및 현황도 작성 용역』추진과 관련하여 현장여건 변경등 실제 조사 완료된 물량에 따라 최종 설계변경 시행코자 보고드림.

Ⅰ. 용 역 현 황

▢ 용 역 명 : 남산공원내 지하매설물 일제조사 및 현황도 작성 용역

▢ 용역기간 : `17.09.11 ∼ `18.03.30

▢ 용 역 비 : 94,919천원

▢ 도 급 자 : ㈜신한종합건축사사무소

Ⅱ. 변 경 내 용

▢ 변경내용

○ 조사 및 측량(단위: ㎞)

구 분	계	상수도/실개천(매설관)	하수도	전력/통신	비고
당 초	14.175	5.275	1.400	7.500
변 경	14.505	5.275	1.284	7.946
증·감	증 0.33	-	감 0.116	증 0.46

○ GIS DB구측(단위: ㎞)

구 분	계	상수도/실개천(매설관)	하수도	전력/통신	가 스
당 초	37.646	8.218	2.019	24.828	2.581
변 경	37.806	8.218	1.773	25.274	2.581
증·감	증 0.16	-	감 0.286	증 0.446	-

▢ 변경사유: 실제조사 완료된 물량에 따른 설계변경

▢ 용역금액

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
1. 조사 및 측량	26,449	26,927	증 478
2. DB 구축	6,591	6,625	증 34
계	33,040	33,552	증 512
재 경 비	36,999	36,561	감 438
성과심사비	3,510	2,218	감 1,292
용 역 비	94,919	94,919	0

Ⅲ. 조 치 계 획

▢ 상기와 같이 총 용역금액은 변경없으며, 실제 조사 완료된 물량에 따라 최종 설계변경 코자 합니다.

붙임:  변경내역서 1부.  끝.