문서번호	공공재생과-5476
결재일자	2018.6.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		서울역재생계획팀장	공공재생과장
유우린		정병익	06/07 홍선기
협조

「중림동 창고 신축공사」

설계용역기간 연장 검토보고

2018.06.

도시재생본부

(공공재생과)

「중림동 창고 신축공사」

설계용역기간 연장 검토보고

서울역 일대 도시재생활성화지역 거점시설(중림동 창고) 신축과 관련 건축위원회 심의 및 건축허가 협의 절차 이행 등 행정처리가 지연됨에 따라 준공기한을 연장하고자 함.

Ⅰ				개 요		‘

◩ 사업개요

○ 위    치 : 중구 중림동 441-1

○ 규    모 : 지하1층/지상2층, 연 면적 231.61㎡

○ 용    도 : 제1종 근린생활시설(주민공동이용시설)

○ 계약기간 : 2018.02.09.~2018.06.08.

○ 계약금액 : 금52,250,000원(금오천이백이십오만원)

○ 설 계 자 : 건축사사무소 에브리아키텍츠(대표 강정은)

◩ 추진현황

○ `18.01.10. 서울역 일대 도시재생사업 관련 거점공간 조성을 위한 설계용역 시행(본부장 방침)

○ `18.01.15. 기술용역타당성 심사 결과 알림(적정)

○ `18.01.23. 중림동 창고 신축공사 설계용역 수의계약 의뢰

○ `18.02.09. 설계용역 계약

○ `18.03.23. 공용건축물 협의(중구)

○ `18.04.30. 중림동 창고 신축공사 건축 심의 의뢰(중구)

○ `18.05.16. 건축위원회 심의(원안가결)

Ⅱ				검토내용		‘

◩ 준공기한 연장 검토 내용

○ 기간연장

- 당초 : 2018.02.09.~2018.06.08.

- 변경 : 2018.02.09.~2018.06.22.(14일 연장)

○ 연장 사유

- 중구 공용건축물 협의 중 관계부서 보완요청에 따른 설계 내용의 수정·보완 및 건축협의 결과 회신 지연 등 기간연장 필요

- 또한 성요셉아파트 주민, 한국경제신문사 등 인근 주민워크숍을 통해 주민협의 및 요청사항 보완 등 일정기간 소요

◩ 검토결과 및 처리의견

○ 기간변경

당 초	변 경	비고(증·감)
`18.2.9.~`18.6.8.	`18.2.9.~`18.6.22.	※용역기간 14일 연장 ※금액변경 없음

○ 연기사유 귀책소재  공공재생과

○ 지체상금 부과여부  미부과

○ 처리의견  협의 결과 등에 따라 요청사항을 반영할 수 있도록 용역기간을 조정·변경 계약처리코자 함.  끝.