문서번호	시설과-1603
결재일자	2018.7.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	공원조성팀장	시설과장	공원운영과장
최종성	송복식	진병규	07/11 오철선
협 조
	경리팀장		곽선아

「보라매둘레길 진출입로 확충 및 노후 산책로 정비공사」

실정사항(1차) 검토 보고

2018. 7.

동부공원녹지사업소

(시설과)

「보라매둘레길 진출입로 확충 및 노후 산책로 정비공사」

실정사항(1차) 검토 보고

우리사업소에서 추진 중인「보라매둘레길 진출입로 확충 및 노후 산책로 정비공사」와 관련하여 현장 실정 사항이 있어 아래와 같이 검토 보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 보라매둘레길 진출입로 확충 및 노후 산책로 정비공사

○ 공사기간 : 2018. 05. 18 ~ 2018. 07. 16.

○ 총공사비 : 금276,226,330원(금이억칠천육백이십이만육천삼백삼십원)

(도급액 : 금172,134,330원/ 관급자재 : 금104,092,000원)

○ 도 급 자 : ㈜케이지에코 대표 윤창일

○ 공사내용 : 연결 목재데크, 목계단 등 시설물 정비

□ 실정사항 보고

○ 주요 변경 내용

(단위 : 원)

공종	현황 및 문제점	검토 내용	비고
도급	▶ 로프울타리 설치 요청(민원사항)	▷ 로프울타리 설치 ·로프울타리(W2,000) : 0경간→4경간	385,630(증)
	▶ 파고라, 테이블 설치 요청(민원사항)	▷ 파고라, 테이블, 의자 설치 ·파고라 : 0경간→2경간 ·테이블(일반인,H600) : 0조→2조 ·테이블B(장애인,H750) : 0조→2조 ·의자(일반인) : 0조→4조 ·의자(장애인) : 0조→2조	9,959,092(증)
	▶ 배드민턴장 옷걸이 설치 요청(민원사항)	▷ 옷걸이 설치 ·옷걸이 설치(W1,500) : 0경간→35경간	307,109(증)
	▶ 관찰데크 시공 구간 기존수목 이식 필요 ▶ 관찰데크 시공 구간 경계석 철거 불필요	▷ 기존수목 이식 ·영상홍 이식(H0.6) : 0주→13주 ·수국 이식(H0.5) : 0주→23주 ·교목이식(R12) : 0주→3주 ▷ 포장경계석 공사 제외 및 폐기물 변경 ·포장경계석 : 12m → 0m ·구조물헐기 : 10.29㎥ → 9.66㎥ ·폐기물상차 : 28.88㎥ → 28.55㎥ ·폐기물 운반비 : 31.48ton → 30.1ton ·폐기물 처리비 : 15.41ton → 14.03ton	1,274,887(증)

공종	현황 및 문제점	검토 내용	비고
도급	▶ 도면과 현장이 상이하여 침목계단 단수 추가 ▶ 축구 샤워장 진입턱이 높아 침목계단 설치 요청 (민원사항)	▷ 침목계단 단수 추가 반영 ·침목계단 : 46단→57단	3,950,837(증)

□ 소요예산 내역(개략금액)

(단위 : 원)

구 분	소요 금액				비고
	당 초	변경	증 / 감
총 공 사 비	276,226,330	297,472,900	증	21,246,570
공 급 가 액	156,485,755	175,800,819	-
부 가 가 치 세	15,648,575	17,580,081	-
도 급 공 사 비	172,134,330	193,380,900	증	21,246,570
관급자재비	104,092,000	104,092,000	-

□ 예산검토

○ 예산집행 내역

(단위 : 원)

구분	예산액	실시설계 용역	공사비집행액				비고
		계약액 (준공)	발주액 (a)	계약액 (b)	잔액 (c=a-b)	관급자재
	328,000,000	13,310,000	194,938,000	172,134,330	22,803,670	104,092,000

‣ 예산과목

- 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화지원, 공원관리         및 도시녹화 지원, 보라매공원 시설물 정비, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

□ 공사연기 검토

○ 연기사유

- 보라매둘레길 진출입로 확충 공사 진행중 사유지 도로 개방에 따른 토지 소유자 반대로 민원 해결 소요기간이 발생하여 공사 수행을 위한 기간 연장 필요

○ 준공기한 변경

- 당초 : 2018.05.18. ~ 2018.07.16.

- 변경 : 2018.05.18. ~ 2018.08.16.

○ 지체상금 부가 검토

- 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

- 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 검토의견

○ 계약부서에 준공기한 변경 계약 요청

○ 본공사 일정에 맞춰 관급자재 납품기한 변경 요청

○ 상기 각 항목별 실정보고 사항에 대하여 공사 시행하고 추후 설계변경 시행

붙  임 : 변경개략내역서 1부. 끝.