투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(보라매둘레길 진출입로 확충 및 노후 산책로 정비공사)

1. 시설과-1603(2018.7.11)호의 관련입니다.

2. 우리사업소에서 추진 중인「보라매둘레길 진출입로 확충 및 노후 산책로 정비공사」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 보라매둘레길 진출입로 확충 및 노후 산책로 정비공사

나. 공사기간 : 2018. 5. 18 ~ 2018. 7. 16

다. 도급금액 : 172,134,330원

라. 도 급 자 : ㈜케이지에코 대표 윤창일

마. 준공기한 연기

- 당 초 : 2018. 5. 18 ~ 2018. 7. 16

- 변 경 : 2018. 5. 18 ~ 2017. 8. 16 (31일 연장)

바. 지체상금 부과검토

- 지체상금 부과여부 : 미부과

붙  임 : 실정사항 검토보고서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	최종성		공원조성팀장	송복식		시설과장	07/12 진병규
협조자
시행	시설과-1606	(		)	접수		(		)
우	07062	서울 동작구 여의대방로20길 33 동부공원녹지사업소 시설과	/
전화	02-2181-1157	/전송	02-2181-1169	/	jongsung79@seoul.go.kr	/	대시민공개