위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	한밭조경 대표 박종업, (주)그린동현 대표 최승용 귀하, 건원엔지니어링 감리단장 귀하
(경유)
제목	119극기훈련시설 설치공사 설계계변경(3회) 승인 통보

1. 관련문서

가. 소방(CM) 제18-353(2018.7.26.)호 “119극기훈련시설 설치공사 실정보고(슬라이딩 삭제) 검토 보고”

나. 한밭 제2018-74(2018.7.26.)호 “「119극기훈련시설 설치공사」 실정보고서(3회) 제출 건”

다. 한밭 제2018-57(2018.6.27.)호 “「119극기훈련시설 설치공사」 설계변경에 실정보고서 제출 건”

2. 건설사업관리단에서 검토하여 제출한 “119극기훈련시설 설치공사의 슬라이딩 제외(실정 보고)건“를 검토한 바, 어린이놀이시설 시설기준의 안전거리 미충족과 이용자의 안전사고 우려 및 운영의 효율성 저하 등 타당성이 인정되며, 설계변경(2회) 실정보고는 본 사업비 한도내에서 조정하여 속히 계약변경을 추진하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
★담당자	곽민규		단장	박정경		소방행정과장	07/27 代이웅기
협조자
시행	소방행정과-18217	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52	/	www.fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1393	/전송	02-3706-1329	/	119mk2@seoul.go.kr	/	대시민공개