문서번호	도로시설과-8699
결재일자	2018.8.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	전용도로팀장	도로시설과장
김창환	김윤기	08/10 代오재영

2019년 자동차전용도로

방음벽 태양광 설치 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 8.

안전총괄본부

도로시설과

2019년 자동차전용도로 방음벽 태양광 설치 추진계획

2019년도 자동차전용도로 태양광 설치 예산편성을 위한 대상구간 선정 및 소요예산 산출 검토 등 사업 추진계획 보고

□ 추진근거

○ 태양광 확산 5개년 종합계획『2022년 태양의 도시, 서울』

(서울특별시장 방침 제206호, ‘17.11.15.)

□ 추진경위

○ ’17.11. : 우리시 태양광 확산 5개년 종합계획 수립 및 과제 선정

○ ’17.11. ~ 12. : 자동차전용도로 대상시설 조사 및 목표 설정

○ ’17.12. : ‘18년 타당성조사 및 실시설계 용역예산 편성 요구(⇒ 미반영)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 자동차전용도로 방음벽 활용 우리시 태양광 사업 추진

○ 사업근거 : 태양광 확산 5개년 종합계획「2022년 태양의 도시, 서울」

(서울특별시장 방침 제206호, 2017.11.15. 녹색에너지과)

○  위    치 : 자동차전용도로 11개 노선 165.02㎞ 중 높이 4.0m 이상 방음벽

○ 규    모 : 방음벽 22개소 A=8,590㎡(길이 8,590m × 높이 1.0m)

○ 사업내용 : 태양광 에너지 생산 1,031kW(길이 8,590㎡ × 1.2kW/10㎡)

○ 사업기간 : 2019.01. ~ 2021.12.

○ 총사업비 : 2,863백만원(설계 120백만원, 공사 2,743백만원)

《 자동차전용도로 방음벽 및 개방형 터널 현황 》

구분	계		올림픽대로		강변북로		내부순환로		기타 노선
	개소	연장(m)	개소	연장(m)	개소	연장(m)	개소	연장(m)	개소	연장(m)
방음벽	22	8,590	5	2,426	15	5,108	-	-	2	1,056

□ 2019년 사업내용

○ 타당성조사 및 실시설계 용역 시행

- 규     모 : 22개소 8,590m

- 용 역 비 : 120백만원

- 용역기간 : 2019. 01. ~ 2019. 11.

□ 향후 추진계획

○ ’19. 01. ~ 12. : 타당성 조사 및 실시설계 시행

- 세부 대상지 선정, 효율성 예측 및 타당성 분석, 실시설계, 우선순위 선정 등

○ ’20. 01. ~ ’21. 12. : 태양광 설치공사 시행

《 연차별 추진계획 》

(단위 : 백만원)

구 분	계 (A+B)	추진계획
		~’17(A)	소계(B)	’18	’19	’20	’21	’22
설계용역(건)	1	-	-	-	1	-	-	-
추진대상(개소)	22	-	22	-	-	15	7	-
설치용량(kW)	1,031	-	1,031	-	-	613	418	-
소요예산	2,863	-	2,743	-	120	1,631	1,112	-

※ 연차별 추진대상 산출

- ‘20년 : 강변북로 방음벽 5,108㎡×1.2kW/10㎡ = 613kW

- ‘21년 : 올림픽대로 및 기타노선 방음벽 3,482㎡×1.2kW/10㎡ = 418kW

※ kW당 단위 공사비용 : 2,660천원/kW (녹색에너지과 제공 ‘19년 태양광 단가 적용)

끝.