문서번호	도로시설과-8705
결재일자	2018.8.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	전용도로팀장	도로시설과장
김창환	김윤기	08/10 代오재영

2019년 자동차전용도로

위험수목정비 및 교체식재 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 8.

안전총괄본부

도로시설과

2019년 자동차전용도로

위험수목정비 및 교체식제 추진계획

2019년도 자동차전용도로 위험수목정비 및 교체식제 사업 예산편성을 위한 정비대상구간 선정 및 소요예산 산출 검토 등 사업 추진계획 보고

□ 추진근거

○ 서울특별시 도로 등 주요 시설물 관리에 관한 조례

○ 서울특별시 가로수 조성 및 관리 조례

○ 자동차전용도로 수목관리 자문요청에 대한 회신(산림생태연구과-890,’15.06.05.)

○ 자동차전용도로 수목관리 현장 자문요청 회신(기후변화생태연구과-465,’18.06.04.)

□ 시설물 현황

○ 대 상 : 올림픽대로 등 10개 노선(154.91km) 교목 27,260주

○ 정비실적

구분 공사명	준공금액	위험수목 정비	식재 수량	비고
2016자동차전용도로 가로수 위험수목 교체 식재공사	198백만원	414주	246주
2017 자동차전용도로 가로수 위험수목 정비공사	200백만원	740주	139주
2018년 자동차전용도로 위험수목 정비공사	150백만원	589주	20주 (예정)	준공 예정

< 사업 추진 필요 사유 >

‣시간이 경과됨에 따라, 노거수 발생 및 수목의 과 성장으로 전도위험성 높음

□ 2019년 사업개요

○ 사 업 명 : 2019년 자동차전용도로 위험수목 정비공사

○ 사업위치 : 올림픽대로 등 10개 노선

○ 사업규모 : 위험수목정비 총 731주

○ 사업기간 : ’19.01 ~ ‘19. 11

○ 사 업 비 : 200,000천원

□ 향후 추진계획

○ ʹ19.01 ~ 02 : 사업 계획수립 및 현장 물량조사, 자체설계

○ ʹ19.02 ~ 03 : 일상감사 및 계약심사

○ ʹ19.03        : 예산배정

○ ʹ19.03 ~ 10 : 공사 발주 및 시행

붙임 : 사업 위치도 1부.  끝

붙임	사업위치도

□ 자동차전용도로 위험수목정비 및 교체식제

▣위험수목 정비

구간: 양화~원효대교

수량: 약 81주

▣위험수목 정비

구간: 청담~강일IC

수량: 약 400주

▣위험수목 정비

구간: 상류IC~하류IC

수량: 약 150주

▣위험수목 정비

구간: 구일역~시흥대교

수량: 약 100주