문서번호	주거재생과-9475
결재일자	2018.8.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주거재생정책팀장	주거재생과장
조은경		하대근	08/14 이동일
협조

-「백사마을 주거지보전구역 맞춤형 주택공급·관리

및 마을공동체 활성화 방안」수립 용역 -

준공기한 연기 검토 보고

2018. 08.

도시재생본부

(주거재생과)

「백사마을 주거지보전구역 맞춤형 주택공급·관리

및 마을공동체 활성화 방안」수립 용역 -

준공기한 연기 검토 보고

현재 추진 중인『백사마을 주거지보전구역 맞춤형 주택공급·관리 및 마을공동체 활성화 방안』수립 용역과 관련하여 수행 결과의 완성도를 보다 높이고자 상호 협의하에 용역기간을 연장하여 추진코자 함.

Ⅰ		용역개요

❍ 용 역 명 : 백사마을 주거지보전구역 맞춤형 주택공급 관리 및 마을공동체 활성화 방안 수립 용역

❍ 계약기간 : ’17.08.21. ~ ’18.08.21.

❍ 용 역 비 : 금197,270,000원(부가세 포함)

❍ 용역업체 : (사) 한국도시연구소 대표 최병두

Ⅱ		추진현황

❍ ’17.08.21 : 용역계약 및 착수

❍ ’17.09.04 : 착수 보고

❍ ’17.10.~’18.5. : 문헌자료 수립 및 분석, 현장답사, 본조사

❍ ’18.05.21 : 관계자 회의 개최(총괄MP, 시·SH공사 등)

❍ ’18.06.05 : 중간보고회 개최(주거재생과장)

❍ ’18.06.21 : 외부전문가 자문회의 개최*****************

❍ ’18.06.27 : 외부전문가 자문결과에 따른 작업지시

❍ ’18.07.05 : 공정보고

Ⅲ		계약변경 사항

❍ 계약변경 내용

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
용역기간	’17.08.21~’18.08.21	’17.08.21~’18.11.21	3개월 연장
용 역 비	금197,270,000원(부가세 포함)		변경 없음
용역업체	(사) 한국도시연구소 (대표 최병두)		변경 없음

❍ 용역기한 연장사유

***************************************************************************

Ⅳ		향후계획

❍ ’18.08.16 : 준공기한 연기

❍ ’18.08.31 : 공정보고

❍ ’18.09.10~20 : 중간보고***************

❍ ’18.10월   : 공정 및 최종 보고

❍ ‘18.11월   : 용역 준공

붙 임 : 1) 준공기한 연기승인 요청서 1부.

2) 합의각서 및 공정계획표 각 1부.

3) ’18.6.27 외부전문가 자문결과 통보 1부.