문서번호	시설보수과-4473
결재일자	2018.8.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
안종필		윤승범	08/22 이성재
협조
	운영과장		최영효

하수처리 자동제어시스템 개선 계획

2018. 8.

중랑물재생센터

(시설보수과)

하수처리 자동제어시스템 개선 계획

노후 · 낙후된 제2처리장(용수공급동, 중랑천용수공급동 포함) 제어시스템을 개선 · 통합하여 효율적인 자동제어시스템을 구축코자 함.

□ 관련근거

□ ‘18.02.14 (중랑) 자동제어시스템 타당성 조사 및 기본설계 용역

□ ‘18.04.02 (2018년) 자동제어시스템 구축 추진계획

□ ‘18.07.10 자동화사업 최종보고회 결과 보고

	【 용 역 개 요 】
사업내실화를 위한 자동제어시스템 타당성 조사 및 기본설계 용역 ▶ 용역기간 : ‘18.3.12 ~ 6.30 / 용역금액 : 22,295천원 ▶ 주요내용 : 자동제어시스템 인프라 구축, 통합사업장(‘18년 2처리장+중랑천용수공급동)

□ 사업개요

□ 사 업 명 : 중랑물재생센터 하수처리 자동제어시스템 제조구매설치

□ 사업기간 : ‘18. 9월 ~ 12월(90일)

□ 소요예산 : 620,846천원(제조 578,266천원, 공사 42,580천원)

※ 총예산 : 1,500백만원(154kV 등 864,021천원, 잔여예산활용 635,979천원)

□ 사업내용 : 제2처리장, 용수공급동, 중랑천용수공급동 제어시스템 개선 · 통합 1식

□ 발주계획

□ 계약방법 : 조달구매(제조), 공개수의(공사)

□ 발주방법 : (입찰방법, 지명조건, 지명방법) 붙임 참조

□ 추진일정

□ ‘18.08 : 일상감사 의뢰, 사전 규격 공고, 조합 추천

□ ‘18.08 : 조달구매 의뢰, 공사발주

□ ‘18.12 : 물품 제작·설치 및 시운전

붙임 1. 입찰방법/지명조건/지명방법 1부.

2. 자동제어시스템 규격서 / 설계내역서 각 1부. 끝.

붙임1

자동제어시스템 제조구매  발주 방법

□ 발주방법

□ 입찰방법 : 지명경쟁입찰(지방계약법 시행령 제22조 10호)

▶「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제6조에 따라 중소벤처기업부장관이 지정·공고한 물품을 「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업자로부터 제조·구매하는 경우

□ 지명입찰 사유

▶ 본 설비는 하수시설에 적용되는 특수한 설비로 침전지, 여과기, 슬러지, 소화조,   용수공급 등의 공정이 복잡하게 구성되어 있어, 해당업체는 자동 공정 항목 등을   정확하게 파악하는 등 관련분야 경험이 풍부한 업체의 참여가 필요함.

▶ 또한 당해 시설물에 발생하는 하수가스 등으로 잦은 고장 등의 우려가 있어,   이를 대응하기 위하여 신속하게 유지보수 능력을 갖춘 업체가 필요함.

▶ 따라서 해당 사업을 효율성과 안전성, 유지관리 등을 감안하여 해당분야의    조합으로부터 우수한 업체를 추천받아 물품을 제작․설치코자 함

□ 지명조건

▶ 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제8조에 의한 중소기업자로서   직접생산확인서(물품분류번호 3912118901, 계장제어장치)를 소지한 업체

▶ 정보통신공사업법 제14조에 따라 정보통신공사업을 등록한 업체

□ 지명방법 : 한국자동제어공업협동조합 5개사 이상 추천

(한국자동제어공업협동조합 회원사 278개사)