투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	준공기한 연기시행(남산 북측순환로)

1. 시설과-3964(2018.8.29.)호와 관련입니다.

2.「남산 북측순환로 노후 탄성포장 정비공사」에 대하여 다음과 같이 준공기한을 연기 시행    코자 합니다.

가. 공 사 명: 남산 북측순환로 노후 탄성포장 정비공사

나. 공사기간: 2017. 12. 15 ~ 2018. 8. 31

다. 도 급 자: 두리종합조경(주) 대표 안태정

라. 준공기한연기

- 당초: 2017. 12. 15 ~ 2018. 8. 31

- 변경: 2017. 12. 15 ~ 2018. 9. 15

붙임: 방침서 1부.

	시설과장
주무관	김철수		시설팀장	기효상		시설과장	08/29 김재균
협조자
시행	시설과-3978	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231 (예장동)	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5964	/전송	02-3783-5969	/	cjftn08@seoul.go.kr	/	대시민공개