투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	보라매둘레길 진출입로 확충 및 노후 산책로 정비공사 설계변경 시행 및 변경계약 의뢰

1. 시설과-2090(2018.8.31.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 추진 중인 『보라매둘레길 진출입로 확충 및 노후 산책로 정비공사』에 대하여 아래와 같이 설계 변경 하여 공사추진에 만전을 기하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 보라매둘레길 진출입로 확충 및 노후 산책로 정비공사

나. 총공사비 : 금276,226,330원(금이억칠천육백이십이만육천삼백삼십원)

(도급액:금172,134,330원/ 관급자재:금104,092,000원)

다. 공사기간 : 2018. 5. 18. ~ 9. 10.

라. 도 급 자 : ㈜케이지에코 대표 윤창일

마. 공사비 변경내역

(단위 : 원)

구 분	소요 금액				비고
	당 초	변경	증 / 감
총 공 사 비	276,226,330	298,727,200	증	22,500,870
공 급 가 액	156,485,755	176,941,091	-	0
부 가 가 치 세	15,648,575	17,694,109	-	0
도 급 공 사 비	172,134,330	194,635,200	증	22,500,870
관급자재비	104,092,000	104,092,000	-	0

바. 예산과목

- 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화지원, 공원관리 및 도시녹화 지원, 보라매공원 시설물 정비, 시설비(401-01)

붙  임 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 변경 내역서 1부. 끝.

	시설과장
주무관	최종성		공원조성팀장	송복식		시설과장	09/03 진병규
협조자
시행	시설과-2092	(		)	접수		(		)
우	07062	서울 동작구 여의대방로20길 33 동부공원녹지사업소 시설과	/
전화	02-2181-1157	/전송	02-2181-1169	/	jongsung79@seoul.go.kr	/	부분공개(5)