투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경(정산) 및 계약의뢰 한강준설(저수로, 취수장) 정비공사 감독권한대행 건설사업관리용역

『한강준설(저수로, 취수장) 정비공사 감독권한대행 건설사업관리용역』에 대해 아래와 같이 설계변경(정산) 시행하고 계약의뢰 합니다.

가. 용 역 명 : 한강준설(저수로, 취수장) 정비공사 감독권한대행 건설사업관리용역

나. 계약기간 : 2018. 4. 2. ∼ 2018.11.27.

다. 계약금액 : 181,494,000원

마. 감 리 사 : 주식회사 정엔지니어링

바. 변경내용

구 분	용 역 비			비고 (단위:원)
	당 초	변 경	증·감
감 리 비	181,494,000	122,540,000	58,954,000

사. 설계변경사유

- 준설대상 구역 감소로 시공안전 및 검측관리를 위한 건설사업관리자(보조) 투입이 필요하지 않아 투입계획을 변경

아. 예산과목

- 깨끗하고 안전한 한강만들기, 한강하천시설관리, 한강저수로정비, 감리비

(감액 29,477천원)

- 깨끗한 물관리, 한강수질개선, 잠실상수원퇴적물준설, 감리비(감액 29,477천원)

첨부 : 1. 내부방침서(설계변경) 1부.

2. 투입계획 변경 보고서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부. 끝.

	치수과장
주무관	김동식		치수과장	11/21 신용철
협조자
시행	치수과-3727	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25)	/
전화	02-3780-0687	/전송	02-3780-0744	/		/	대시민공개