투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	설계변경 시행 및 변경계약 의뢰(보라매공원 테마 물놀이터 조성공사 폐기물처리 용역)

1. 시설과-3101(2018.12.06.)호와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 추진중인 『보라매공원 테마 물놀이터 조성공사 폐기물처리 용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경하고자 하오니 변경계약 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 보라매공원 테마 물놀이터 조성공사 폐기물처리 용역

나. 계약금액 : 금9,700,000원(금구백칠십만원)

다. 용 역 사 : 서울환경(운반), ㈜장형기업(처리)

라. 용역내용 : 보라매 물놀이터 조성공사 중 발생한 폐기물의 운반 및 처리

마. 용역비 변경내역

(단위 : 원)

구 분		소요 금액				비고
		당 초	변경	증 / 감
용역비	공급가액	8,818,182	9,932,000	증	1,113,818
	부가가치세	881,818	993,200	증	111,382
	계	9,700,000	10,925,200	증	1,225,200

바. 예산과목

- 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화지원, 공원관리 및 도시녹화지원, 보라매공원 시설물 정비, 시설비(401-01)

붙   임 :  1. 설계변경 검토보고 1부.

2. 변경내역서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	여은솔		시설관리팀장	김영균		시설과장	12/06 진병규
협조자
시행	시설과-3106	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33 시설과 (신대방동)	/
전화	02-2181-1159	/전송	02-2181-1169	/		/	부분공개(5)