문서번호	조경과-7027
결재일자	2018.12.11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

						시 민
주무관	주무관		조경과장		관리부장		서울대공원장
김성태	이옥하		강인호		심상원		12/11 송천헌
협 조
	총무과장					이행용
	전략기획실장					유연호

서울대공원 테마가든 개선 공사 -

설계 변경 검토 보고

2018. 12.

서 울 대 공 원

(조 경 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

서울대공원 테마가든 개선 공사 -

설계 변경 검토 보고

「서울대공원 테마가든 개선 공사」추진 중 현장여건 반영 등에 따른 설계변경 사항이 발생하여 아래와 같이 검토 보고드림
		ㅊ
	ㅊ

1		공사개요

○ 공 사 명 : 서울대공원 테마가든 개선 공사

○ 위    치 : 테마가든 내

○ 공사내용 : 장미터널 및 포토존 설치, 휴정원 정비 등

○ 공사기간 : 2018.11.05. ~ 12.14.

○ 도 급 액 : ************

○ 도급업체 : ㈜그룹이십일 대표 이용훈

2		설계변경 내용

○ 설계내역 변경

공 종	설계 변경내용	비고
이설 및 철거	· 장미원 단지 일부 개선(정원형 장미 ⇒ 스텐다드 장미)에 따른 추가 공정 발생 - 단지 내 기존 조형물(동상) 추가 이설 : 당초 : 1개 ⇒ 변경 : 2개 - 단지 내 조명등 추가 철거 : 당초 : 1개 ⇒ 변경 : 4개 - 장미 식재지 절토 : 당초 0㎥ ⇒ 변경 : 18㎥
	· 부식 등으로 쓰러질 우려가 있는 기존 목재 장미터널 철거 및 덩굴장미 이식 활용 - 목재 장미터널 철거 : 당초 : 0개소 ⇒ 변경 : 5개소 - 기존 덩굴장미 이식 : 당초 : 0주 ⇒ 변경 : 36주

공 종	설계 변경내용	비고
이설 및 철거	· 휴정원 내 기존 화단 추가 철거에 따른 화단경계석 이설 및 수목 이식물량 변경 - 화단경계석 이설 물량 증가 : 당초 : 236m ⇒ 변경 : 281m - 수목(측백나무) 이식 물량 증가 : 당초 36주 ⇒ 변경 : 38주
	· 이식목(측백나무) 중 일부 고사되거나 수형이 불량한 수목 제거 조치 - 측백나무 제거 : 당초 : 0주 ⇒ 변경 : 25주
	· 휴정원 내 설치되어 있는 기존 등의자 활용 - 신규 등의자 설치 물량 감소 : 당초 : 6개소 ⇒ 변경 : 3개소
수목식재	· 휴정원 및 고향정원 내 그늘목 식재 - 왕벗나무 식재 : 당초 : 0주 ⇒ 변경 6주 - 이팝나무 식재 : 당초 : 0주 ⇒ 변경 6주
폐기물 처 리	· 목재장미터널 및 공원등 철거로 발생되는 폐기물(콘크리트 기초 등)은 서울대공원 자체 폐기물 처리 시 일괄 처리(시설과) 폐기물 물량 :당초) 폐콘 0.575ton, 혼폐 0.1ton ⇒ 변경) 0
제경비	· 각종 보험료(건강보험료, 연금보험료 등) 정산 처리 · 환경보전비, 건설기계대여대금 지급보증 정산 처리

○ 공사금액 변경

(단위 : 원)

구 분	공 사 금 액		증 감	비고
	당 초	변 경
****	**********	**********	************
*****	*********	*********	************
*****	**********	**********	************

3		예산확보 방안

○ 예산확보 방안 : 낙찰차액 활용

(단위 : 원)

예산액	발주금액	원인행위금액	예 산 잔 액
			계	낙찰차액	집행잔액
250,000,000	249,996,790	233,851,040	16,152,170	16,148,960	3,210

○ 예산과목 : 서울대공원 총무과, 공원이용시민 만족도 향상, 다양한축제 및 볼거리프로그램 운영, 장미원 유지관리, 시설비및부대비, 시설비

4		검토의견

○ 공정상 긴급을 요하는 일부 공정은 선 시공 후 설계변경 시행 조치

○ 현장여건 반영에 따른 물량 증가, 보험료 등 제경비 정산 등은 설계변경 시행 조치

붙임 : 1. 설계변경내역서. 1부.

2. 계약금액조정 검증확인서 1부. 끝.