＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	암사아리수정수센터
수신자	정수시설과장
(경유)
제 목	변경 계약체결 안내

공사 및 물품 변경 계약을 아래와 같이 체결하고 계약서 사본을 붙임과 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 변경 계약내역

변경 계약일자 (당초 계약일자)	건 명	계약상대자	계약금액(원) (수수료 포함)		준공기한	비고
			당초	변경	변경없음
2018.12.26 (2018.11.28)	암사 제2정수장 여과지 퇴수밸브 교체공사	㈜삼우이엔텍 이경수	48,893,600 → 60,930,000		2019.01.01
2018.12.26 (2018.11.12)	암사아리수정수센터 정문경비실 신축전기공사	㈜윤성전기 김영환	24,461,308 → 24,461,300		2018.01.11
2018.12.26 (2018.08.31.)	암사 제2정수장 여과지 역세척펌프 제작구매설치	동아기공 황용완	297,193,600 → 295,700,900		2019.01.28
2018.12.26 (2018.10.01)	1정수장 염소실 RCS 제어반 제자구매설치	㈜종성테크 임성규	229,981,950 → 228,990,100		2018.12.30
2018.12.26. (2018.10.05.)	암사 제2정수장 여과지 역세첨펌프 기동반(MCC) 제작구매설치	삼덕전기(주) 이문수	80,020,000 → 79,651,000		2019.01.01

붙임 : 변경 계약서 사본 5부.  끝.

	행정관리과장
주무관	변민용		행정관리과장	12/28 김인웅
협조자
시행	행정관리과-12886	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131	/
전화	02)3146-5712	/전송	02)3146-5707	/	byunmy@seoul.go.kr	/	대시민공개