문서번호	시설관리과-24454
결재일자	2018.12.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	시설관리과장
최지영	제영도	12/31 편병률

´19년 노후 배관 정비 구간 선정 및 계획

2018. 12.

강남수도사업소

(시설관리과)

´19년 노후 배관 정비 구간 선정 및 계획

맑고 깨끗한 아리수 공급 및 유수율 향상을 위한 우리사업소 서초구 관내 ′19년 노후 배관 정비 사업을 위한 구간 선정 및 사업 계획에 대해 보고드립니다.

Ⅰ	’19년 대상 사업 예정

□  사업 현황

구분	계	무단수 급수체계	송배수관	배급수관
건수	4	1	2	1

□ 단위사업 : 4건(무단수 급수체계, 송배수관, 배급수관)

※ 단가계약 : 3건(급수공사, 시설물정비, 누수복구)

Ⅱ	’19년 단위 사업 추진 계획

□  무단수 급수체계 구축사업

□ 정비대상 : 1.25km

□ 추진계획

공 사 명	공사개요	사업비 (백만원)	공사기간	비고
계	D=300~500㎜, L=1250m	1,272
내곡지구 이중화 배관부설사업	D=300~500㎜, L=1250m	1,272	’19. 4. ~ 11.

※ 무단수 급수체계 구축사업 : 누수, 수질사고 등 돌발 사고 대비 블록시스템 구축, 정수장간 공급체계 구축 및 주요관로 이중화를 통하여 단수없는 안정적인 급수 공급체계를 구축하는 사업

□  노후 송․배수관 정비사업

□ 정비대상 : 1.07km

□ 추진계획

연번	공 사 명	공사개요	사업비 (백만원)	공사기간	비고
계		D=1200㎜, L=1,070m	4,500
1	예술의전당~우면삼거리간 송배수관 정비공사	D=1200㎜, L=670m	2,500	’19.4. ~ 11.
2	사평대로~삼호가든사거리간 송배수관정비공사	D=1200㎜, L=400m	2,000	’19.4. ~ 11.

※ 노후 송․배수관 정비사업 : 400mm 이상 대형 상수도관으로 누수 및 녹발생이 많은 회주철관과 노후 강관을 정비하여 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급하는 사업

※ 사평대로~삼호가든사거리간 송배수관정비공사에 대해서는 기존 D=800㎜ 및 900㎜는 철거 및 폐쇄하고 D=1200㎜ 신설 부설 예정임

□  배급수관 정비사업

□ 정비대상 : 1.6km

□ 추진방법 : 단위사업 및 장기계속 단가계약으로 시행

□ 추진계획

연번	공 사 명	공사개요	사업비 (백만원)	공사기간	비고
서초동1341번지 외 6개소		D=80~300㎜, L=1,280m	1,010
1구간	서초동 1668-16~1668-17	D=150㎜,L=40m	20	’19.3. ~ 11.	CIP 84(92)
2구간	서초동 1631-1~1632-1	D=300㎜,L=180m	197	’19.3. ~ 11.	CIP 81(89),야
3구간	서초동 1699-7~1695-21	D=100㎜,L=185m	82	’19.3. ~ 11.	CIP 84(92)
4구간	잠원동 56-2~56-3	D=200㎜,L=170m	93	’19.3. ~ 11.	SP 91
5구간	방배동 1423~1444	D=150㎜,L=155m	77	’19.3. ~ 11.	PE 91
6구간	방배동 1426~1546	D=150㎜,L=100m	50	’19.3. ~ 11.	PE 91
7구간	서초동 1341~1364-11	D=300㎜,L=450m	491	’19.3. ~ 11.	PE 91,야
연간단가 작업건		D=80~300㎜, L=320m		’19.3. ~ 11.

※ 정비대상 1.6km 중 잔여 320m 노후배관은 공사 중 발견 즉시, 연간단가 업체 작업하고자 함

※ 노후 배급수관 정비사업 : 350mm 이하 상수도관으로 누수 및 녹발생이 많은 회주철관과 PVC관을 정비하여 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급하는 사업

※ 금년도 노후 배급수관 정비사업 선정에 있어  도로굴착 가능한 회주철관 및 PVC관을 우선적으로 선정하고 기타 관령이 높은 관 중에서 수질 등 민원 빈번한 지역에 대해 관 교체하고자 함(잠원동 SP, 방배동·서초동 흑PE관)

붙임: 공사위치도 1부.  끝.