문서번호	물순환정책과-23783
결재일자	2018.12.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재이용관리팀장	물순환정책과장
정재훈		代송유경	12/31 代김동완
협조

'18년 빗물관리시설 확충사업 현장점검 결과 보고

2018. 12.

물순환안전국

(물순환정책과)

'18년 빗물관리시설 확충사업 현장점검 결과 보고

「2018년 빗물관리시설 확충사업」준공 관련하여 시·구 합동 현장점검을 시행하고 결과를 보고 드림

□ 점검개요

○ 점검대상 : 2018년 빗물관리시설 확충사업

○ 점검기간 : 2018.12.11.~2018.12.26.

○ 점검방법 : 시·구 합동 현장점검(육안점검)

○ 점 검 자

조명	점검자		비고
	서울시	자치구 등
1조	정재훈	성북(치수과): 유진호, 성동(토목과): 최영기 동대문(치수과): 장성호, 은평(치수과): 김세준
2조	김동우	마포(공원녹지): 위신혜, 영등포(푸른도시): 김정미 양천(공원녹지): 유경희‘ 구로(공원녹지): 오동욱
3조	김종민	송파(도로과): 정다희, 송파(공원녹지): 유승아 서초(도로과): 이초록, 강남(도로관리): 김대영
4조	하 록	도봉(도로과): 최성호, 중구(공원녹지): 김연주 중부공원녹지사업소(시설과): 기효상
총괄 : 물재이용관리팀장

□ 주요 점검내용

○ 빗물관리시설 시공품질 등 실태 점검

- 투수포장, 측투측구, 침투 트렌치, 띠녹지 등 빗물관리시설 설치기준 준수 여부

○ 공사현장 안전관리 등 실태 점검

- 소음·분진 방지, 발생토 처리, 자재 보관, 공사안내 등 현장관리 상태

- 보행자 통로 확보 등 공사장 안전관리 상태

○ 공사완료를 위한 결산 보고서 작성 점검

□ 점검결과

○ 사업완료에 따른 결산 보고서 미제출(은평구 외 1)

○ 점검 후 지적사항 : 총 18개소에서 2건 지적

- (마포구) 공사자재 적치로 현장에서 시정 조치

- (영등포구) 투수블록 줄눈 채움재 보충 요청

※ 지적사항 2건은 경미한 사항으로 현장에서 지도점검 시행

□ 향후일정

○ '19.01. : 결산보고서 미제출 자치구 등은 준공결산 독려

붙  임 : 현장점검 결과 내역.  끝.