문서번호	급수운영과-20595
결재일자	2018.12.31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
이재헌		12/31 박희철
협 조

준공기한 연기보고(신설216, 대치동 936-17)

2018. 12.

강남수도사업소 (급수운영과)

준공기한 연기보고

1. 현    황

○ 공사위치 : ****************

○ 작업지시 : 신설 216

○ 공사개요 : 단독근생

○ 공사기간 : 2018.12.07.~2018.12.11.

2. 보 고 내 용

○ 공사현장 자재물 적치로 인하여 수용가로부터 공사준공기한 연기원이 제출되어  상기 공사에 대하여 준공 기한을 연기 코져합니다.

3. 조치의견

○ 상기 보고내용에 의거 현재 작업지시한 공사건에 대하여 아래와 같이 공사기간을 연기하고자 합니다.

․ 당초 : 2018.12.07.~2018.12.11.

․ 변경 : 2018.12.07.~2018.12.30.

○ 지체상금 부과여부 : 미부과.  끝.