투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	준공기한 연기에 따른 변경계약 의뢰

우리부에서 시행중인 「제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 실시설계 건설사업(설계감리)용역」에 대하여 아래와 같이 과업기간이 연장되어 변경계약 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용역기간 연장내용

가. 용역명 : 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 실시설계 건설사업(설계감리) 용역

나. 계약금액 : 129,599,000원

다. 계약업체 : ㈜대한콘설탄트  대표 박광하

라. 용역기간

- 당초 : 2017.5.24. ~ 2018.1.18.

- 변경 : 2017.5.24. ~ 2018.5.31.

붙임 : 1. 준공기한 연기보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 준공기한 연기 요청 공문(합의각서 포함) 1부.   끝.

	토목부장
주무관	윤창렬		토목설계과장	여용석		토목부장	01/05 代이동훈
협조자
시행	토목부-314	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2586	/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개