＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	남부수도사업소
수신	수도권매립지관리공사 사장
(경유)
제목	토사반입 기간 연장 요청 (2018년 남부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사)

1. 평소 수도공사 업무에 적극 협조하여 주시는 귀 공사에 감사를 드립니다.

2. 우리사업소에서 시행중인『2018년 남부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사』에서     발생되는 토사에 대해 토사반입 기간을 연장 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 토사반입 기간 연장 내용

공 사 명	기간 연장		사 유
	당초	변경
2018년 남부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사	2018.3.23. ~ 2018.12.31.	2018.3.23. ~ 2019.6.30.	장기계속단가계약 공사로서 준공기한이 2019.6.30.으로 토사반입 기간 연장 요청

끝.

	남부수도사업소장
주무관	황중연		주무관	류태현		급수운영과장	전결 01/03 이성환
협조자
시행	급수운영과-162	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-4572	/전송	02-3146-4589	/	1966hjy@seoul.go.kr	/	부분공개(6)