문서번호	간호과-83
결재일자	2019.1.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	간호과장	간호부장
변정순	유정자	01/04 박영숙

24시간진료실 리모델링공사 주간공정계획 및 추진현황 회의 보고

우리병원 24시간진료실의 리모델링 진행상황을 점검하고 안전하고 차질없는 공사를 위한 회의에 참석하였기에 보고합니다.

□ 24시간진료실 리모델링공사 추친현황

○ 일  시 : 2019. 1. 3.(목) 10:00~11:30

○ 참석자 : 변정순(간호부 시설관련 업무담당), 정경미(24시간진료실 수간호사)

○ 진행내용

- 24시간진료실 내부공사가 진행 중으로 방수와 미장 공사가 들어가야

하나 한파(공사장 내부 온도 –2℃)로 지연되고 있음

내부 온도를 높이는 난방 대책 → 비용발생 문제로 서무팀과 회의예정

- 간호부에서 결정해야 될 사항

∙ 24시간진료실 내 벽과 문 칼라 선정

→ 전체 조화를 감안, 벽색 먼저 결정하고 문의 색은 나중에 선정

(여닫이, 미닫이, 방화문)

- 린넨실 추가 문 설치에 대한 사항 공사팀에 요청

※ 설계도 그림 참조

*************

첨부 1. 24시간 진료실 증축공사 예정공정표 1부

2. 주간공정계획 및 추진현황보고서 1부.  끝.