문서번호	토목부-196
결재일자	2019.1.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		도시고속도로과장	토목부장
서민석		명경출	전결 01/04 김영수
협조
	주무관		백종임

공사홍보용 VMS설치 검토보고

[구로고가 철거공사]

2019. 1.

공사홍보용 VMS설치 검토보고

[구로고가 철거공사]

「구로고가 철거공사」중 운전자에게 공사구간 진입전 공사진행중임을 홍보하고, 차량우회 등 대체노선을 선택할 수 있도록 하기위한 공사홍보용 VMS 설치에 대한 검토보고 드림.

1		관련근거

❍ 도기본-18-14216(`18.12.05.) : 교통혼잡 완화를 위한 교통관리요원 배치 및 공사홍보용 VMS 설치

❍ 광안건(구) 제2018-58(`18.12.31.) : 실정보고(공사홍보용 VMS설치)

2		공사개요

❍ 위    치 : 구로구 가리봉동 140(남부순환로, 디지털단지5거리 주변)

❍ 규    모 : 고가차도 철거(폭 18.5m, 연장 536m)

❍ 공사기간 : '18.8. ~ '19.6.

❍ 도 급 비 : 6,756백만원

❍ 시 공 사 : 새천년종합건설 주식회사 외 2개사

❍ 감 리 사 : 동부엔지니어링㈜ 외 2개사

3		건설사업관리단 보고내용

□ 공사홍보용 VMS설치 검토

❍ 설치위치 : 남부순환로(시흥⇒구로방향 2개소, 구로⇒시흥방향 2개소)

※ 공사지점(남부순환로 본선)을 기점으로 상행, 하행 교차로 각2개소씩 총 4개소 설치

❍ VMS 제작설치 및 유지관리 비용 검토

- 공사홍보용 VMS제작 견적대비표(1개소당)

(단위:원)

구 분	프로안전	삼흥물산	계림C＆C	비고
공사홍보용VMS제작	1,650,000	2,000,000	1,800,000	공급가액 (VAT제외)
낙찰율(85.516%)	1,411,014	1,710,000	1,539,000
선 정	◎

- 공사홍보용 VMS 유지관리 단가검토 :

1회(배터리교체 1일 1회) × 2개방향(구로,시흥방향) ×  0.15인(1.2시간) × 2인 × 118,130원(보통인부) × 낙찰율(85.516%) = 60,612원/일(50일)

□ 공사비 증·감 현황

【단위 : 천원】

구 분		당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
공사비	직접공사비	-	8,675	8,675
	제 경 비	-	2,962	2,962
	계	-	11,637	11,637
공급가액			11,637	11,637
부가가치세		-	1,163	1,163
총 공 사 비		-	12,800	12,800

4		검토결과

❍ 공사홍보용 VMS 설치에 대하여 검토한 결과, 운전자에게 공사구간 진입전 홍보 및 대체노선을 선택할 수 잇도록 하기 위한 VMS설치 위치 및 비용은 적정한 것으로 판단되어 건설사업관리단 보고내용과 같이 시행하고자 함.

5		조치계획

❍	위 건에 대하여 실정보고 승인 통보하고 추후 설계변경에 반영코자 함.

붙임 : 건설사업관리단 실정보고 검토의견서 1부.  끝.