문서번호	도로관리과-197
결재일자	2019.1.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
전문관	도로조명팀장	도로관리과장
안계훈	김흥정	01/04 박문희

`18년 노후 도로조명시설 개선사업 완료보고

2019. 01.

안전총괄실

(도로관리과)

`18년 노후 도로조명시설 개선사업 완료보고

`18년 노후 도로조명시설 개선 사업을 완료하고 그 결과를 보고드림.

□ 사업현황

❍ 노후 도로조명시설 개선 사업

- 위 치 : 서울특별시도상 가로등(효자로 등 34개 노선)

- 규 모 : 노후선로 교체(73.5km), LED광원 개선(5,295등),

분전반 개량(149면), 가로등주 개량(2,342본).

- 총사업비 : 15,145백만원

□ 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

예산집행 현황					집행잔액 내 역
예산현액 (a)	재배정액	지출액 (b)	집행잔액 (a-b)	집행율 (b/a)
15,145	15,145	14,329	815	94,6%	- 명시이월 : 194 - 낙찰차액 등 : 621

□ 사업추진 실적

❍ 노후 도로조명시설 개선 사업

구분	사업대상	선로 개량	등주 개량	LED개량	분전함 개량	비고
당초계획	26개 노선	57.8(Km)	2,291(본)	2,351(등)	145(면)
추진실적	34개 노선	73.5(Km)	2,342(본)	5,295(등)	149(면)	명시이월 1건

❍ 설계도서 사전심사를 통한 예산절감액 및 낙찰차액 활용

노후 도로조명시설 개선사업에 대한 설계도서 사전심사로 발생한 예산절감액 및 낙찰차액을 재활용하여 재정운용의 효율성 제고.

- 예산 절감액 활용 : 1,240백만원

- 낙찰차액 활용 : 330백만원

[예산절감액 활용]

1*************************************

**************************************

***************************************

**************************************

*************************************

************************************

******************************************

**************************************************

**************************************************

[낙찰차액 활용]

*****************************************

*************************************

***************************************

*************************************

***************************************

*************************************

붙임 : `18년 노후 도로조명시설 개선사업 관련 추진현황 1부.  끝.