투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(해양관 돌고래야기관 조성공사 설계용역 3회)

1. 시설과-130호(2019.1.8)와 관련입니다.

2. 해양관 돌고래이야기관 조성공사 설계용역에 대하여 준공기한을 아래와 같이 연기하여 주시기 바랍니다

가. 용역개요

- 용 역 명 : 해양관 돌고래이야기관 조성공사 설계용역

- 계 약 자 : ****************

- 계약금액 : **************

나. 용역기간 연기

변 경 전	변 경 후	비 고
2018. 7. 23.~2019. 1. 9	2018. 7. 23.~2019. 2. 28	50일 연기

다. 연기사유

- 전시연출 및 수유실 등 부서 요구사항 반영에 따른 배치계획 및 전기설계 지연

라. 지체상금 부과여부 : 미부과(귀책 : 서울대공원)

붙임 : 1. 해양관 돌고래이야기관 조성공사 설계용역 준공기한 연기 검토보고서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	김용주		시설과장	01/08 오임석
협조자
시행	시설과-134	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02) 500-7411	/전송	02) 507-7230	/	kyjoo@seoul.go.kr	/	부분공개(6)