문서번호	수상안전과-107
결재일자	2019.1.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	수상안전과장	운영부장		한강사업본부장
최윤정	백성훈	송영민		01/10 정수용
협 조	총무과장		박병현
	주무관		박인수

한강아라호 선박 안전 검사 계획

2019. 1.

한강사업본부

(수상안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

한강아라호 선박 안전 검사 계획

계선신고 된 한강아라호의 운항을 위해 선박안전법에 따른 중간검사 및 수리 계획을 수립하여 안전관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추 진 개 요

추진근거

○ 선박안전법 제9조(중간검사)

○ 선박안전법 시행규칙 제19조(중간검사)

- 여객선의 검사종류(제1종) 및 검사시기(매년)에 관한 사항

○ 선박안전법 시행규칙 제31조(검사의 준비 및 서류제출의 완화 등)

- 여객선의 입거 또는 상가 검사에 관한 사항

추진대상

선명	선체규모(m) (길이, 폭, 깊이)	톤수	속도	승선정원	건조일
한강아라호	55.5 x 12 x 2.5	688톤	10노트	310명	’10.10.20.

□ 추진사유

○ 계선신고(운항중지) 된 한강아라호의 운항 재개 및 효율적인 안전

관리를 위해 선박안전법에 따른 선박검사 실시

- 아라호의 입거(상가) 검사는 상가대가 있는 인천 조선소에서 가능

○ 장기간 소송 및 운항중지로 선박 관리가 이루어지지 않아 선체 및

기관의 전체적인 수리와 정비가 필요

※ ’18년도 검사 취소 및 계선

○ 검사기간 : ’18. 2. 12. ~ ’18. 3. 23.(기준일: ’17. 11. 18.(전후3개월)

○ 검사기관 : 한국선급(KR) 서울지부(민상섭, 김철웅 검사관)

○ 검사장소 : 여의도 임시 선착장

○ 검사결과

날 짜	검사 결과	비 고
’18. 2. 12.	1차 검사 완료
’18. 2. 14.	2차 검사 완료
’18. 3. 12.	3차 검사 불가	임대업체(렛츠고코리아)의 임시선착장 및 한강 아라호 출입문 폐쇄로 검사관(KR) 출입 불가능
’18. 3. 16.	4차 검사 불가	3차와 동일 사유
’18. 3. 23.	중간검사 취소	임대업체의 소송으로 검사 불가능
’18. 3. 23.	계선신고	계선기간 : ’18. 3. 23.~’19. 3. 22.

Ⅱ		추 진 계 획

□ 검사개요

○ 검 사 기 관 : 한국선급(KR) 인천지부

○ 검 사 장 소 : 인천조선소

○ 검 사 기 간 : ’19. 3. 20. ~ 4. 13.(25일간)

- 입거(상가)검사를 위한 검사장소는 인천 조선소이며, 한강아라호가         인천으로 가기위한 한강 갑문 통과는 선박톤수(688톤), 흘수(1.6m),         조석 간만차를 감안하여 고조때 운항해야하나, 1월~2월은 갈수기로써

고조 수심이 낮고 유빙이 있어 갑문 통과가 어려움

- 갑문통과 시기는 3월이후의 고조 수심때(’19.3.22.)가 적합함

- ’19.3.22. 오전 고조(05:48, 894)에 따라 09:30 한강갑문 통과하여

오후 고조(18:09, 920)에 따라 17:00 조선소 상가 작업 예정

○ 검 사 방 법 : 입거(상가)검사

- 선체검사는 상가하여 수리 후 수검

- 기관검사는 주기관 및 발전기 개방검사로 수검

□ 작업내용

〔하상정리 작업〕

○ 한강아라호의 안전항로 확보를 위한 한강갑문 앞 하상정리 작업 필요

○ 안전한 한강갑문 통과를 위한 스팟바지 및 예인선 보조 필요

〔선체검사〕

○ 선박 상가 후 도장작업 및 선저 외판 교체 후 수검

○ 소화설비, 무선설비, 구명장비, 구명설비, 항해계기 점검

○ 각종 장비 작동 상태 확인, 기타 수리 등

○ 수리 및 점검 완료 후 시운전

〔기관검사〕

○ 주기관, 발전기 개방 검사

○ 주기관, 발전기 부품, 필터, 윤활유등 교환 및 안전장치 작동상태 점검

○ 주배전반 등 절연저항 시험 및 수검

○ 추진기 실린더 수리 및 시운전

□ 작업업체 선정

〔하상정리 작업〕

○ 선정방법 : 수의계약

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항5호

- 준설, 하상 작업 및 예인 업무는 고도의 전문성과 안전성이 요구되는 사항

으로 경험이 풍부한 업체를 선정

○ 소요예산 : 금20,000천원(부가세별도)

〔선박 수리〕

○ 선정방법 : 제한경쟁입찰

○ 소요예산 : 금195,000천원(부가세별도)

○ 입찰자격 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조

요건을 갖추고 한강아라호(688톤)를 상가할 수 있는 상가대를 소유한

조선소로써, 공고일 현재 주사무소가 서울특별시 또는 인천 광역시 또는

경기도내에 소재한 선박건조 또는 선박수리에 관한 업종으로 공장등록을

필한 업체

○ 용역기간 : 계약 후 착수일로부터 25일이내

□ 추진일정

○ ’19. 1. 10. ~ 1. 30. : 계약심사 및 사전규격공고

○ ’19. 2. 1.  ~ 2. 28.  : 계약의뢰 및 입찰공고

○ ’19. 3. 1.  ~ 3. 15.  : 하상정리 작업 수의계약의뢰

○ ’19. 3. 10. ~ 3. 15. : 선박안전검사 신청

○ ’19. 3. 20. ~ 4. 13. : 선체·기관 수리 및 검사

□ 행정사항

○ 하상정리 작업 수의계약체결             : 총무과

○ 선박 수리 용역계약체결(제한경쟁입찰)   : 재무과

○ 선박 안전 검사(임시항해검사, 중간검사) : 한국선급(KR)

Ⅲ		소 요 예 산

□ 예 산 액 : 금215,00천원(부가세 별도)

○ 한강공원 등 운영 및 관리, 시설비(100-401-01)

구 분	소 요 예 산	산 출 내 역
계	215,000천원
하상정리 작업	20,000천원	○ 하상정리 및 예인작업 20,000천원
선체 수리	74,000천원	○ 선체 상·하가 작업 24,000천원 ○ 선체 도장 작업 28,000천원 ○ 선저 외판 교체 작업 22,000천원
기관 수리	121,000천원	○ 엔진 개방 검사 및 수리 64,000천원 ○ 발전기 개방 검사 및 수리 57,000천원

붙임  견적서 7부.  끝.