투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	시민활동지원과장
(경유)
제목	난지 자전거공원 MTB코스장 리모델링조성 공사 추가 작업공정 요청

1. 시민활동지원과-8(2019.1.3)호와 관련입니다.

2. 난지 자전거공원 MTB코스장 리모델링조성 공사를 추진함에 있어 아래와 같은 추가 작업 및 보완사항이 있어 보고하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 추가작업 : 난지 자전거공원 MTB코스장 목재휀스 교체

- 길 이 : 300m

- 사 유 : 2010년 조성된 MTB코스장으로 시민들의 안전을 위해 필요한 목재휀스가 부후 노후되어 교체 필요.

나. 보완사항 : 배수구 위 석축공사 보강공사

- 사유 : 장마철 우수에 의하여 토사유입 및 석축공사 무너질 우려가 많음.

3. 현장 사진

배수로위 석축 쌓기	노후된 목재휀스 (기능상실)

끝.

	난지안내센터장
주무관	전평환		센터장	01/10 홍정원
협조자
시행	난지안내센터-54	(		)	접수		(		)
우	03900	서울특별시 마포구 한강난지로 162	/
전화	3780-0611	/전송	3780-0610	/		/	대시민공개