문서번호	조경과-538
결재일자	2019.1.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	조경시설팀장	조경과장		푸른도시국장
현호재	석승우	문길동		01/10 최윤종
협 조

2019년 물을 이용한 친수공간 조성사업 추진계획

2019. 1

푸른도시국

(조경과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2019년 물을 이용한 친수공간 조성사업 추진계획

바닥분수, 벽천, 계류 등 수경시설 신규 조성 및 기존시설 재정비 통하여 시민들이 쾌적한 휴식공간을 제공하고 청량한 가로경관을 조성하기 위함.

1		추친방향

❍ 휴게 및 조명시설 등을 설치하여 사계절 이용가능한 친수공간 조성

❍ 노후 수경시설을 재정비하여 안전사고 예방 및 청량한 가로경관 조성

❍ 여름철 성수기 수경시설 가동기간을 고려하여 조기 착공 및 준공 추진

2		사업개요

❍ 대 상 지 : 지하철역, 광장, 교통섬 등 주요 가로변(시유지)

❍ 사업기간 : 2001년 ~ 2022년(계속)

❍ 사업내용 : 수경시설 설치 및 휴게공간 조성, 노후 수경시설 정비 등

❍ 총사업비 : 48,956백만원(‘18년 이전 44,851, ‘19년  2,954 , ‘20년 이후 1,151)

< 추진실적 >

▸ ’01 ~ ’18년, (신규)조성 51개소, (보수)정비 30개소

구 분		계	2016년 이전	2017년	2018년	비 고
개소수	조성	51	48	1	2
	정비	30	21	4	5
조성면적(㎡)		172,723	156,832	8,411	7,480
사업비(백만원)		44,851	41,531	1,355	1,965

`18년 - 동대문구 군자교 녹지대	`18년 - 성동구 금호터널 입구	‘18년 - 송파구 오금동 방이역 1번출구

3		추진계획

❍  대 상 지 : 용산구 한강로3가 69-2 한강대교 북단 교통섬 등 9개소

❍  규    모 : 18,500㎡(신규(3) 4,704㎡, 재정비(6) 13,796㎡)

❍  사업기간 : 2019. 1. ~ 12.

❍  사업내용 : 수경시설 설치 및 휴게공간 조성, 노후 수경시설 정비 등

❍  사 업 비 : 2,954백만원(시설비 2,950, 시설부대비 4)

❍  추진기관 : 용산구 등 8개구

❍  추진일정

- 2019. 1.        : 사업계획 수립(통보), 기술용역타당성 심사

- 2019. 2. ~ 3.  : 시민소통(의견수렴), 실시설계용역 시행 등

- 2019. 3. ~ 4.  : 설계심의, 계약심사, 공사발주 등

- 2019. 4. ~12.  : 공사시행

4		행정사항

❍ 자체설계에 따른 도면작성비 및 설계용역비 재배정

- 수목식재 및 시설물설치 등 단순 공종인 경우 유사 사례를 참고 자체설계

- 사업내용이 복합 공종으로 실시설계용역이 필요한 경우「기술용역 타당성

심사결과」에 따라 설계용역비 재배정

❍ 설계심의(조경과) 및 공사비 재배정

- 시의회 소통결과 포함하여 설계심의 요구(구 → 시)

- 일상감사 또는 계약(원가)심사 결과에 따라 공사비 재배정(시 → 구)

❍ 공사 착·준공 후 5일 이내 보고 철저

- 착·준공보고 시 설계심의 결과 반영 추진 관련 자체점검표 등 작성 제출

붙임 1. 2019년 사업대상지 현황 1부.

2. 2019년 사업추진 현황(제출서식) 각 1부.  끝.