“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	더유니스타(주) 대표이사 박래영(04549 서울특별시 중구 을지로20길 37, 3층 (인현동2가 더유니스타 대체영업장) (인현동2가))
(경유)
제목	세운6-3-1,2구역 경관녹지 조성구간 사용연장 협조요청

1. 중구 도심재생과-10717호(’18.11.19.)호와 관련입니다.

2.『세운상가군재생사업 2단계」공공공간 조성사업과 관련하여 세운6-3-1,2구역 경관녹지 조성구간 내 공사현장 작업자 대기공간 및 창고부지 사용여부에 대하여 ’19.2.22.까지 사용 가능하다고 하였으나, 공공공간 조성사업이 ’20.4월까지 완료예정임으로 그 사용기간을 사업 완료시까지 연장요청 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 그간 협의결과

〈중구 도심재생과〉

- 세운6-3-1,2구역 준공관련 경관녹지 조성은 서울 시에서 시행하는 공공공간 조성공사(신설계단)와 일부 중복되므로 공사완료 시까지 현장작업자 대기공간 및 공사 창고부지로 사용하고, 차후 공사완료 시 서울시에서 조성함이 바람직하며, 경관녹지 조성 비용은 중구청에 예치 하는것으로 협의 필요함.

〈중구 공원녹지과〉

- 세운6-3-1,2구역 준공과 연계하여 경관녹지을 조성할 경우 서울시에서 시행하는 공공공간 조성공사와 중복되어 차후, 철거가 예상됨으로 경관녹지 조성은 제외하고, 차후 서울시가 공공공간 조성공사와 연계하여 조성함이 바람직함.

붙임 : 1. 공공공간 조성사업 신설데크D구간(경관녹지) 관련도면 1부.

2. 공공공간 조성사업에 따른 경관녹지 사업자의견 제출 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이현철		다시세운관리팀장	代이현철			01/14 조남준
협조자
시행	역사도심재생과-467	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 역사도심재생과	/
전화	2133-8511	/전송	2133-0742	/	hyen1234@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)