문서번호	시설과-79
결재일자	2019.1.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	동부공원녹지사업소장
최종성	진병규	01/15 안수연
협 조

2019년 옥상녹화·텃밭조성사업 계획

2019. 1

동부공원녹지사업소

(시설과)

2019년 옥상녹화·텃밭조성사업 계획

2019년도 옥상녹화 대상지로 선정된 대검찰청 등 2개소 옥상녹화·텃밭조성사업 계획을 아래와 같이 수립하여 시행에 만전을 기하고자 함.

□ 사업근거

○ 2019년 옥상녹화 텃밭 조성사업[조경과-563호(2019.1.11.)]

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 대검찰청 등 2개소 옥상녹화·텃밭조성 사업

○ 대 상 지

- 대검찰청(서초구 반포대로 157)

- 서울고등법원 서관(서초구 서초중앙로 157)

○ 사업기간 : 2019. 1. ～ 11.

○ 총사업비 : 550백만원

- 대 검 찰 청: 300백만원(시지원액:150백만원, 자부담액:150백만원)

- 서울고등법원 서관 : 250백만원(시지원액:125백만원, 자부담액:125백만원)

○ 면    적 : 1,981㎡(대검찰청:1,181㎡, 서울고등법원 서관:800㎡)

□ 추진방향

○ 건물 안전성을 유지하는 범위 내에서 다층식재로 생태 다양성 확보

○ 녹지율을 80%이상 확보하여 도심 내 녹지량 확충에 기여

○ 생태적, 경관적 효과뿐만 아니라 이용성 등을 고려하여 조성

○ 건물 유지관리가 용이하도록 조성

□ 세부 시행계획

○ 구조안전진단 시행 : 구조안전진단 금액이 소액(11백만원)으로 전문업체와 수의계약

- 서울고등법원 서관은 2018년 구조안전진단 기 시행하여 대검찰청만 구조안전진단 시행

○ 실시설계용역 시행 : 제한경쟁입찰 (지역제한, 26백만원)

○ 공 사 시 행 : 제한경쟁입찰 (지역제한, 515백만원)

□ 향후 추진일정

○ 2019. 01 : 사업참여 동의서 및 자부담액 입금 요청

○ 2019. 01 : 건축물구조안전진단 용역타당성 심사 요청

○ 2019. 01 ~ 02 : 건축물구조 안전진단 및 옥상녹화 유형제안용역 시행

○ 2019. 02 : 옥상녹화 협약 체결

○ 2019. 03 : 실시설계용역 타당성 심사 요청

○ 2019. 03 ~ 05 : 실시설계 용역 시행

○ 2019. 06 ~ 10 : 공사 시행

○ 2019. 11        : 보조금 정산 및 시설물 인계

붙임 : 2019년 옥상녹화·텃밭 조성사업 추진계획 (市조경과) 1부. 끝.