투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	관급자재(단가계약) 납품기한 연장 의뢰 [서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계)]-공기순환기

1. 설비부-608(2019.1.15.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행 중인 ‘서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계)’ 관련, 관급자재 대하여      납품기한 연장을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 납품기한 연장 내용

계약번호	계약업체	계약금액(원)	납품기한		비고
			당 초	변 경
************	*** **	**********	2019.1.18.	2019.04.14.	□ 계약금액 변경없음 □ 납기 86일 연장

나. 납품기한 연장사유: 선행 공종(건축 등) 공사 일정에 맞춰 후속 공종인 관급자재 납품일정 조정이 필요

다. 납품기한 연장 귀책소재: 본부

라. 지체상금 부과 여부: 미부과

따로 붙임  1. 방침서 1부.

2. 납기연장 관련문서(합의각서 포함) 1부.

	설비부장
주무관	박경철		시책사업과장	임병국		설비부장	01/15 임정규
협조자
시행	설비부-620	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8647	/전송	3708-8659	/	pkc6896@seoul.go.kr	/	부분공개(5)