투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	용역 계약변경 의뢰 [하남선(5호선연장) 궤도공사(1공구) 감독권한대행 등 건설사업관리용역-2차]

1. 도시철도토목부-433호(2019.01.14.)와 관련한 내용입니다.

2. 우리 부에서 시행 중인『하남선(5호선연장) 궤도공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(1공구) 2차』에 대하여 아래와 같이 계약변경을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 하남선(5호선연장) 궤도공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(1공구)

나. 계약금액 : 일금 980,500,000원

다. 용역기간 : 2017.08.23. ~ 2019.02.22.

라. 계 약 자 : ㈜동명기술공단 외 1사

마. 변경사항

구 분		당 초	변 경	증,감	비 고
총차	계약금액	980,500,000원	949,300,000원	감 31,200,000원
	공사기간	2017.08.23. ~ 2019.02.22.	2017.08.23. ~ 2019.01.31.	감 22일
2차 (2회)	계약금액	780,500,000원	749,300,000원	감 31,200,000원
	공사기간	2018.01.01. ~ 2019.02.22.	2018.01.01. ~ 2019.01.31.	감 22일

바. 변경사유 : 계약금액 조정 및 용역기간 조정

붙임 : 1. 관련문서 사본 1 부.

2. 변경내역서 1부.

3. 합의각서 1 부.  끝.

	도시철도토목부장
주무관	최경호		궤도과장	최진규		도시철도토목부장	01/15 정대현
협조자	주무관	조태현		주무관	김근수
시행	도시철도토목부-507	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스 9층	/
전화	772-7243	/전송	772-7306	/	ckh4815@seoul.go.kr	/	대시민공개